문서번호	총무과-18969
결재일자	2019.6.18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	시설관리팀장	총무과장
석명오	김창중	06/18 김혜정

2019년 청사 녹지대 유지보수공사(연간단가) 설계변경(1차) 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 6.

총 무 과

2018년 청사 녹지대 유지보수공사(연간단가)

설계변경(1차) 검토 보고

2019년 청사 녹지대 유지보수공사(연간단가) 시행 중 계약 물량 증․감 및 신규공종을 반영한 설계변경(제1차) 사항을 검토 보고함

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2019년 청사 녹지대 유지보수공사(연간단가)

○ 공사기간 : ****************************

*******액 : 금44,381,010원(금사천사백삼십팔만일천일십원)

○ 계 약 자 : 에스에이치조경 주식회사(대표 임수호)

○ 계약내용 : 녹지대 식재 및 시설물 유지보수(23개 공종)

□ 설계변경 사유 및 주요내용

○ 관련 근거

- 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준 공사계약 일반조건(행자부예규 제47호, ’18.11.8)

- 2019년 청사 녹지대 유지보수공사(연간단가) 설계변경 적용단가 검토보고(’19.6.14)

○ 설계변경 사유

- 청사 녹지대 유지보수 공사 중 유지관리 대해 계약물량 변경 및 신규공종을 추가 계약하고자 함

○ 설계변경 주요내용

구 분	주요 변경내용	수 량		비 고
		변경 전	변경 후
물량감소	한지형 잔디	400㎡	280㎡	3공종
물량증가	섬기린초	100본	300본	4공종
신규비목	등의자 설치	-	1식	10공종

- 국민건강 및 연금보험의 사후 정산

▸ 지방자치단체입찰및계약집행기준(행정안전부예규 제21호, ‘18.1.10)

제1장 제8절에 따른「보험료 사후 정산」

○ 설계변경 금액

- 당초 : 금44,381,010원

- 변경 : 금44,381,010원(증감없음)

○ 계약기간 변경

당 초	2019. 3. 11 ~ 2019. 12. 31
변 경 후	변 경 없 음

□ 설계변경 적용단가 합의내용

- 설계변경으로 인한 계약금액 조정(지방자치단체공사계약일반조건.Ⅶ)

▸ 물량 증․감 : 계약단가 적용

▸ 신규비목 : 설계변경 당시를 기준으로 산정한 단가와 동 단가에 낙찰율(87.54%)을 곱한 금액의 범위안에서 협의 결정

□ 향후일정

○ 변경 계약  --------------  2019. 6. 18.(화)

○ 1차 기성 준공 -----------  2019. 6. 20.(목)

- 1차 기성 준공 금액 : ***********

계약금액	금회(1차) 준공금액	잔여금액	비고
***********	***********	***********

붙임 : 1. 설계변경 내역서 1부

2. 공사완료 보고서 1부

3. 설계변경 합의각서 1부.  끝.