문서번호	토목부-10717
결재일자	2019.6.18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

					시 민
주무관	터널건설과장	토목부장	시설국장		도시기반시설본부장
이현국	여용석	김영수	代정진일		06/18 한제현
협 조

-올림픽대교 남단IC 연결램프 구조개선공사-

올림픽대로 진입램프 신설 사업추진계획 보고

2019. 6.

도시기반시설본부

( 토 목 부 )

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	■	□
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

- 올림픽대교 남단IC 연결램프 구조개선공사 -

올림픽대로 진입램프 신설 사업추진계획 보고

올림픽대교 남단 사거리 교통 지․정체 완화를 위한 올림픽대로~한가람로 진입램프 신설에 대한 사업 계획 변경 시행 계획을 보고드림

Ⅰ		관 련 근 거

○ 사업계획 변경 보고【도로계획과-7896(‘19. 6. 7.)호】

○ 제1차 사업계획변경 조정 심의회 결과통보【기술심사담당관-10671(‘19. 6. 4.)호】

Ⅱ		사 업 개 요

○ 사 업 명 : 올림픽대교 남단IC 연결램프 구조개선공사

○ 공사위치 : 송파구 풍납동 일대

○ 사업규모

- 램프신설 : L=1,383m (교량 446m 포함)

- 램프이설 : L=1,309m (교량 139m 포함)

- 올림픽대로 이설 : 하남방향(L=1.21km), 김포방향(L=1.16km)

○ 사업기간 : 전체 ‘16. 04. ~ ‘20. 03. (4차 : ‘19. 1. 22. ~ ‘19. 12. 31.)

○ 총사업비 : 전체 47,343백만원 (‘19년 : 8,200백만원)

○ 감리사/시공사 : ㈜이산외 2개사 / ㈜덕일외 2개사

○ 공 정 율 : 56%

Ⅲ		추 진 경 위

○ ‘12.03. : 타당성조사 및 기본계획

○ ‘13.05. ~ ‘15.06. : 기본 및 실시설계

○ ‘15.09. ~ ‘15.10. : 강남지역 추진계획 방침 및 재투자심사

○ ‘16.04. : 공사 착공

○ ‘18.11. / ‘19.03.  : 진정서 접수(도로계획과)

- 한가람로→올림픽대로(하남방향) 진입로 신설 요구 *********************

○ ‘19.05.31. : ‘제1차 사업계획변경 조정심의회’ 개최(행정2부시장외 6명)

< 심 의 결 과 >

- 교통편익과 안전을 확보하는 방안으로 계획변경 “적정”

· 교통영향에 대한 세밀한 분석 필요

· 회전반경 확보 및 신호체계 적용 등 현장여건에 따른 섬세한 설계 시행

· 아산병원 등 이해관계자와 협의가능 여부 검토

○ ‘19.06.10. : 사업계획 변경 통보(도로계획과)

- 사업계획변경 조정심의회 의견을 반영, 본선공사와 연계하여 추진할 것

Ⅳ		사업계획 변경 내용

□ 한가람로→올림픽대로(하남방향) 진입램프 추가 신설 (증 4,692백만 원)

○ 아산병원 이용객의 한가람로를 통한 올림픽대로 직접 진입로 신설

- 교통분산효과로 올림픽대교 남단 사거리 지·정체 완화

- 올림픽대교·아산병원 진출 차량의 엇갈림 일부 해소하여 교통 안전성 향상

< 현 황 도 >

< 사업규모 변경 >

구 분	사 업 규 모
	당 초	변 경	증 · 감
연결램프 신설 본선 이설 옹벽 방음벽	· 1개소 / 1,383m · 1,210m · 6개소 / 423m · 1개소 / 219m	· 2개소 / 1,595m · 1,500m · 8개소 / 715m · 2개소 / 369m	· 증 212m · 증 290m · 증 292m · 증 150m

○ 총사업비 변경

(단위 : 백만 원)

구 분	당 초	변 경	증 · 감	비 고
합 계	44,900	49,592	증 4,692
설 계 비	905	1,127	증 222
공 사 비	41,223	45,523	증 4,300
감 리 비	2,772	2,942	증 170

Ⅴ		조 치 계 획

○ ***************

- **************************************************************************************************************************************

· ******************************

○ **********

- ********************************************************************************************

Ⅵ		향 후 일 정

○ ‘19.06~‘19.12. : 실시설계 시행(관련기관 협의 등)

○ ‘20.이후 : 본선공사와 연계하여 공사 착공

붙 임  1. 사업계획변경 관련 방침(도로계획과) 1부.

2. 사업계획변경 조정심의회 결과 1부.  끝.