문서번호	도시철도사업부-5971
결재일자	2019.6.19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		신교통과장	도시철도사업부장
박중모		성원배	06/19 최병훈
협조
	주무관		박노성

- 별내선(8호선연장) 1공구 건설공사 -

본선 개착구간 암반선 변경(암판정) 검토 보고

2018. 6.

도시기반시설본부

(도시철도국사업부)

- 별내선(8호선연장) 1공구 건설공사 -

본선 개착구간 암반선 변경(암판정) 검토 보고

별내선 1공구 건설 공사 중 암반선 변경에 따른 암판정을 실시하고 결과에 따라 토공 등 변경 사항에 대한 검토 보고임.

1		관 련 근 거

○ 건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침 제140조(암반선 확인)

- 공사감독자는 공사 착공 즉시 암판정위원회를 상시 구성・운영하고 암반선 노출 즉시

암판정을 실시하도록 하여야 하며, 직접 육안으로 확인하고 정확한 판정을 위해 필요한

추가 시험을 실시하여 암판정 결과를 발주청에 보고

- 암판정위원회는 공사감독자, 외부전문가 등으로 구성하고 시공회사 현장대리인이 입회

○ 별내 감1-19-356호(2019.6.17.) 본선개착 암판정 결과 보고

2		공 사 개 요

○ 공 사 명 : 별내선(8호선연장) 1공구 건설공사

○ 공사규모 : 연장 L=1,184m, 정거장 1개소

○ 도 급 비 : 80,199백만원(1차: 15,843백만원)

○ 공사기간 : 2017.8.23. ~ 2023.8.21.

○ 시 공 사 : 쌍용건설㈜

○ 사 업 단 : ㈜동해종합기술공사 외 3

3		보 고 내 용

○ 굴착공사 중 지질변화로 인한 암반선 변경에 따른 토공 수량 변경 필요

- 본선 개착구간(1-2구간 215m, 2구간 5m) 암판정 실시 현황

일 자	내 용	위 치	판정자
’18.9.21	∘암 판정 실시 1회	∘ 본선개착 2구간 (STA 1km 180~185, L=5m,1차)	암판정위원 외 현장대리인 입회
’18.10.12	∘암 판정 실시 2회	∘ 본선개착 2구간 (STA 1km 180~185, L=5m,2차)	암판정위원 외 현장대리인 입회
’19.5.23	∘암 판정 실시 3회	∘ 본선개착 1-2구간 (STA 0km 525~550, L=25m)	암판정위원 외 현장대리인 입회
’19.2.27	∘암 판정 실시 4회	∘ 본선개착 1-2구간 (STA 0km 550~600, L=50m)	암판정위원 외 현장대리인 입회
’19.1.31	∘암 판정 실시 5회	∘ 본선개착 1-2구간 (STA 0km 600~660, L=60m)	암판정위원 외 현장대리인 입회
’19.3.14	∘암 판정 실시 6회	∘ 본선개착 1-2구간 (STA 0km 660~730, L=70m)	암판정위원 외 현장대리인 입회
’19.4.23	∘암 판정 실시 7회	∘ 본선개착 1-2구간 (STA 0km 730~740, L=10m)	암판정위원 외 현장대리인 입회

- 암판정 구간 위치

암판정

위  치

암판정

위  치

- 암판정 결과 평면도 및 단면도

○ 평면도

○ 단면도

- 암 시험결과

구 분		일축압축강도		탄성파 속도		판정
		연암기준	시험치	연암기준	시험치
본선개착 1-2구간	1회	70~100Mpa	87.9Mpa	2.7~3.7㎞/s	3.425㎞/s	연 암
	2회	70~100Mpa	84.3Mpa	2.7~3.7㎞/s	3.340㎞/s	연 암
본선개착 2구간		70~100Mpa	72.1Mpa	2.7~3.7㎞/s	3.760㎞/s	연 암

○ 암판정 반영 토공 수량 증·감 현황

구 분	규 격	단위	수 량			비고
			당 초	변 경	증, 감
본선개착 1-2구간	토 사	㎥	201,506	200,164	-1,342
	풍화암	㎥	25,523	24,927	-596
	연 암	㎥	19,073	21,011	1,938
본선개착 2구간	토 사	㎥	13,185	13,185	0
	풍화암	㎥	6,207	5,875	-332
	연 암	㎥	1,873	2,205	332

○ 공사비 증·감 대비표

(단위 : 백만원)

공 종	당 초	변 경	증, 감	비 고
직접공사비	5,378	5,396	12
간접공사비	1,363	1,368	5
암매각공제	-	-73	-73
도급공사비	6,741	6,691	-50

※ 암매각 공제대 : 24,219㎥ × 3,000원 =72,657천원

4		건설사업관리단 의견

○ 본선개착 굴착 시행 중 지질상태가 설계사와 다르게 노출되어 암판정  시행후 토공 수량(토사, 풍화암, 연암)을 변경하는 사항으로 적정하게 산출되어 향후 설계변경시 반영함이 타당하다고 사료됨.

5		조 치 계 획

○ 건설사업관리단의 암판정 결과를 반영한 토공 수량 변경 검토 의견은 적정하다고 사료되므로 승인 조치하고, 향후 설계 변경시 정산 반영코자 함.

붙임 : 1. 건설사업관리단 검토의견서 1부.

2. 시공사 관련문서 1부.  끝.