문서번호	설비부-9117
결재일자	2019.6.19.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		녹색성장과장	설비부장
박도원		오삼록	06/19 임정규
협조

『남산예장자락 재생 기계설비공사』

관급자재(에스컬레이터) 실정보고

2019. 6.

도시기반시설본부

(설 비 부)

『남산예장자락 재생 기계설비공사』

관급자재(에스컬레이터) 실정보고

『남산예장자락 재생 기계설비공사』관련 계약 체결된 관급자재(에스컬레이터) 제원이 건축 설계서와 상이하여 에스컬레이터 규격을 변경하고자 함.

1		계약현황

○ 건    명: 남산예장자락 재생 기계설비공사 에스컬레이터 제조 설치

○ 계약금액: ************

○ 납품기한: 2019. 12. 31.(계약일 ‘18. 09. 18.)

○ 계약상대자: ㈜아남테크서비스 대표 문권선

○ 추진사항: 착공계 서류 검토 및 간섭 공종간 업무 협의

○ 계약물품 규격 및 수량

품 명	규 격	수 량	비 고
에스컬레이터(옥외형)	1200(W) 30도-11,000(H)	2대	상행, 하행
에스컬레이터(옥내형)	1200(W) 30도-7,500(H)	2대	상행, 하행

※ 에스컬레이터 설치 개소는 2개소(1개소당 상행, 하행 2대 설치)

2		관련근거

○ 남산예장 감리 제2019-237호(`19.06.12): 에스컬레이터 설치변경에 따른 현황보고

3		문제점 및 사유

○ (문제점) 기계･건축 설계서상 에스컬레이터 규격 상이

- 기계:  형식 1200형, 디딤판 폭 1,000mm, 층고 11m, 경사각도 30도

- 건축: 형식  800형, 디딤판 폭   600mm, 층고 11m, 경사각도 30도

○ (사유) 건축설계사[(주)사이플랜건축사사무소]에서 에스컬레이터 제원 오류 설계

※ 에스컬레이터 설계는 건축사에서 설계하고, 기계 설계사에서 비교견적 등을 검토

(기계) 1,200형(디딤판 폭 1000)	(건축) 800형(디딤판 폭 600)

4		검토결과

○ 에스컬레이터 규격은 기본설계 건설기술심의(‘16.10.08.)에서 800형(디딤판 폭 600mm)로 결정되었으나, 건축설계사에서 오류 설계

- 건축에는 800형으로 설계하고, 기계분야한테 1,200형으로 설계 납품

○ 기계분야에서 에스컬레이터 제원을 변경하는 것이 적합

○ *************************

- *********************************************************************************************

5		추진계획

○ 에스컬레이터 설계변경(1200형⇒800형) 시행

- (우리부) 계약상대자와 단가 협의하여 조달청에 설계변경 요청

- (조달청) 자체적으로 비교견적 검토하여 설계변경 시행(발주처 협의단가 참고)

6		향후일정

○ 2019. 6월 : 에스컬레이터 설계변경 검토 업무지시(설비부⇒감리단)

○ 2019. 7월 : 에스컬레이터 단가협의 및 설계변경 검토보고(설비부)

○ 2019. 8월 : 에스컬레이터 변경 계약의뢰(설비부⇒조달청)

○ 2020. 8월 : 에스컬레이터 착공 예정

○ 2020. 11월 : 에스컬레이터 준공 및 시운전

붙임  1. 감리단 실정보고 1부.

2. 건축설계사 벌점부과 알림 1부.  끝.