문서번호	시설관리과-11732
결재일자	2019.6.19.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설관리과장
이한수		김성호	06/19 변재홍
협 조

설계변경 심의위원회 개최결과 보고

(2018년 북부수도사업소 관내 긴급누수복구공사)

2019. 06.

북부수도사업소

(시설관리과)

설계변경 심의위원회 개최 결과 보고

『2018년 북부수도사업소관내 긴급누수복구공사(장기계속단가계약)』시행중 신규공종 및 시공물량 증·감 사항이 발생됨에 따라 설계변경 심의위원회를 개최하여 심의 완료하고 그 결과 보고 드림.

1. 일 반 현 황

가. 공 사 명 : 2018년 북부수도사업소관내 긴급누수복구공사(장기계속단가계약)

나. 공사개요

- 당 초 : 누수복구   900개소, 불용관정비 500개소

- 변 경 : 누수복구 1,161개소, 불용관정비 937개소

※ 신공종 및 계약물량 증·감(설계변경 사유서 참조)

다. 공사기간 : 2018.06.07. ~ 2019.06.30.(총부기기간 : 2018.06.07. ~ 2019.06.30.)

라. 계약금액

- 당  초 : 금 2,210,438,090원

- 변  경 : 금 2,205,137,000원

*************************

**********

******************************************

*************************

*************************

***************************************************

3. 심 의 내 용

○ 신규공종 및 계약물량 증·감에 대한 설계변경 사항으로 단가계약공사의 특성상 발생

가. *******************

나. *****************************

다. ***********************

4. 설계변경 내역

구 분	당 초	변 경	증·감	비 고
도 급 비	*************	*************
공급가액	2,009,489,173	2,004,670,000
부 가 세	200,948,917	200,467,000

○ 신규공종 및 시공물량 증·감에 따른 변경

가. 신규공종 발생

- ***********************

나. 공사 중 물량 증·감 사항 발생

- ***************************************

- **********************************

○ 설계변경 계약물량 증감 현황

구 분	합 계	신규공종	증 가	감 소	비 고
계	952	17	168	767
토 공	83	-	26	57
부 설 공	545	11	38	496
구 조 물 공	44	1	3	40
부 대 공	72	1	18	53
포 장 공	44	1	10	33
사급자재	164	3	73	88

5. 심의결과

가. 설계변경의 타당성 : 타당함

나. 신규공종 발생유무 및 적용 적정성 : 적정함

다. 제잡비 적정 산정 및 적용 적정성 : 적정함

라. 계약변동(증·감) 물량 게약단가 낙착율 적정 적용여부 : 적정함

마. 각종 제반 규정 준수여부 : 준수

바. 관련규정의 불명확한 내용에 대한 검토 : 적합

붙 임 : 1. 설계변경 사유서1부.

2. 설계변경 심의결과서 1부.

3. 설계변경 내역서1부.  끝.