문서번호	방재시설부-8879
결재일자	2019.6.19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		치수시설과장	방재시설부장
한승균		조성만	06/19 이임섭
협 조

서초역~방배로간 도로개설공사

서초역 사랑의교회 측 1개차로 확장공사 검토 보고

2019. 6

도시기반시설본부

(방재시설부)

서초역~방배로간 도로개설공사

서초역 사랑의교회 측 1개차로 확장공사 검토 보고

서리풀터널 개통 시 서초대로 교통정체 발생이 예상되어, 좌회전 대기로 인한 정체를 개선하고자 서초역구간 1개차로 확장을 위한 검토 보고임

공사개요

○ 위    치 : 서초구 방배동 내방역 ~ 서초동 서초역(대법원 앞)

○ 규    모 : 도로개설 폭 40m(왕복 6~8차로), 연장 1.28㎞(터널 400m)

○ 공사기간 : '15.10. ~ '19. 6.

○ 도 급 비 : 49,948백만원

○ 시공사 / 사업관리 : 롯데건설(주) / ㈜제일엔지니어링 외2

보고내용

○ 서초역 사랑의교회 측 1개차로 확장 검토

- 대법원에서 성모병원 방향 좌회전(유턴)차로 확장 : 2차로 → 3차로

구 분	평 면 도
명달 교차로 ~ 서초역 구간

- 사랑의교회 앞 : 보도 추가 Set-Back(1.5m) 및 차로폭 조정, 차로확장

․당초 6차로(좌2+직3+우1) → 변경 7차로(좌3+직3+우1)

- 더바인웨딩홀 앞 : 보도 추가 Set-Back(3.4m) 및 차로폭 조정

․당초 4차로(좌1+직2+직우1) → 변경 4차로(좌1+직2+직우1) ※직우차로 넓게조정

○ 주요 공사물량 증․감내역

구 분	규 격	단위	당 초	변 경	증․감(△)	비 고
토공
무근콘크리트깨기	30cm미만	㎥	-	68	68
배수공
원심력사각수로관	400*500*2000	개소	-	15	15
포장공
블록포장	투수블록,화강판석	㎡	-	231	231
보차도경계석	곡선, 직선	m	-	248	248
소규모포장	아스팔트(야간)	㎡	-	298	298
관급자재대
아스콘	표층,중간층,기층	ton	-	147	147

- 개략공사비 : 49백만원(증)

건설사업관리단 의견

○ 서리풀터널 개통 시 서초대로 교통정체 발생이 예상되어 서초역사거리 좌회전차로를 확장(2차로→3차로)하여 좌회전 대기로 인한 정체를 개선하고자 서초구에서 요구하는 서초역 사랑의교회 측 1개차로 확장공사의 반영은 타당하며, 해당 공종의 수량 및 공사비 산정은 적정하다 판단됨.

보고자 의견

○ 건설사업관리단의 검토의견이 적정한 것으로 판단되며 공기에 변동이 없으므로 실정보고 사항을 승인처리하고 추후 설계변경시 계약내역에 반영하고자 함.

붙임 : 건설사업관리단 검토의견서 1부.  끝.