문서번호	시설과-1229
결재일자	2019.6.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	시설과장	서부공원녹지사업소장
이석중	박선미	문인기	06/19 남길순
협 조

하늘공원 현장근로자 대기실 및 창고 신축공사

실정보고 검토 보고

2019. 6.

서부공원녹지사업소

[ 시 설 과 ]

하늘공원 현장근로자 대기실 및 창고 신축공사

실정보고 검토 보고

우리사업소에서 시행 중인『하늘공원 현장근로자 대기실 및 창고 신축공사』관련 현장 여건 및 실측물량 변경사항에 따른 감리사 실정보고가 접수되어 반영 여부 검토 보고 드림.

□ 공사개요

❍ 위    치 : 마포구 월드컵로 243-60 (하늘공원 정상)

❍ 규    모

- 대기실동 : 약 320㎡ 1층, 철근콘크리트조

- 창 고 동 : 약 149㎡ 1층, 경량철골조

❍ 공사기간 : ’18. 12. 28. ~ ’19. 8. 24.

❍ 도 급 비 : 589,294,290원

❍ 도 급 자 : 태극건설 대표 손정현

□ 실정보고 검토

연번	구 분	실정보고내용	검토의견
1	철근콘크리트공사	▪대기실 기초형태 변경(매트기초 → 외측면 줄기초) ▪창고 줄기초 상세도 및 수량산출서 누락분 수정 ▪창고 진입부 및 좌·우측면 바닥 콘트리트 타설 추가	승인
2	조경공사	▪기존 식재 이식 중 상수리 및 모감주나무 밀집으로 굴취 시 분 형성이 불가하여 자연상태 수목에 가까운 대형수목 상수리나무 2주 제거 ▪관목 이식 수량 실측에 따른 일부 수정 ▪창고 부지 수목 제거 기 시공으로 수량 감	승인

연번	구 분	실정보고내용	검토의견
3	철골공사	▪창고 철골 기둥 기초앙카, 베이스플레이트 하부 무수축 몰탈 타설 추가 ▪창고 외장재 하지철물(C형강)설치 추가 ▪창고 우수유입방지 방수턱 설치 추가 ▪창고 지붕 처마판넬 보강파이프 추가	승인
4	금속공사	▪창고 출입문 앞 스틸그레이팅 기 설치로 수량 감	승인
5	기타	▪대기실 지상1층 높이(G·L) +1.5m → +2.9m 변경 ▪대기실 지상 1층 높이 변경으로 보행 경사로 계단으로 변경 ▪대기실 부지 우측면 대형 상수리나무로 건물위치 좌측 2m 이동 ▪창고부지 실측에 따른 평면치수 일부 조정 ▪창고 높이 구조도와 마감도 상이하여 마감도 치수 적용 ▪대기실 PIT층 터파기 시 폐기물 노출로 폐기물 수량 다소 증가	승인

□ 행정사항

❍ 상기 검토내용에 따라 실정보고 사항을 공사에 반영하여 공사 시행에 만전을 기하고자 함.

첨 부 : 실정보고서 1식.  끝.