	서울특별시
수신	문화체육관광부장관(문화기반과장)
(경유)
제목	총사업비 조정 수정 요청(서소문밖 역사유적지 관광자원화 사업)

1. 관련문서

가. 문화체육관광부 문화기반과-5178(2018.12.24.)

나. 중구청 건축과-10527(2019.5.31.)호 및 11890(2019.6.20.)호와 관련입니다.

2. 「서소문밖 역사유적지 관광자원화 사업」과 관련하여 붙임과 같이 총사업비 조정 수정안을 제출합니다.

가. 총사업비 자율조정 내역 (수정안)                            (단위:백만원)

구 분	요 구	반 영	증 감(B-A)	비 고
자율조정	75,469	75,428	△41	·지중소화수조 철거 및 상수도소화전 설치 등

나. 총사업비 협의조정 내역                                     (단위:백만원)

구 분	현 행(A)	변 경(B)	증 감(B-A)	비 고
<총사업비>	75,428	80,839	5,411
1. 공사비	49,587	54,089	4,502	·추가공사, 관련부서 요구 반영 등에 따른 변경
2. 보상비	21,228	21,228	-
3. 시설부대경비	4,613	5,522	909	·감리비 증가

붙임 : 1. 총사업비 조정관련 공문(중구청) 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	이정은		지역관광팀장	김향자		관광정책과장	06/20 김태명
협조자
시행	관광정책과-7382	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서소문동)	/
전화		/전송		/		/	부분공개(5)