투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(별내선 1공구 사토장 변경에 대한 설계변경 반영물량 승인 알림)

1.업무지시현장 : 별내선(8호선연장) 1공구 건설공사 쌍용건설(주), 별내선(8호선연장)

1공구 건설공사 주식회사 동해종합기술공사

2.작 성 일 자 : 2019-06-20 10:06:08

3.지 시 내 용

가. 별내 감1-19-364호(2019.6.4.)와 관련입니다.

나. 별내선(8호선연장) 1공구 건설공사의 기 승인된 사토장(수암광업)에 대하여 1, 2차분 공사 물량만 우선 설계변경 반영(약 161,000㎥)하고, 잔여물량은 근거리 사토장 조사결과에 따라 향후 설계변경 반영을 요청한 건설사업관리단의 의견이 적정한 것으로 사료되어 승인하오니, 관련업무 추진에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.  끝.

주무관							박중모			신교통과장					성원배					도시철도사업부장					06/20 최병훈
협조자				주무관						박노성
시행			도시철도사업부-6017									(						)		접수											(						)
우	04520					서울특별시 중구 청계천로 8 (무교동 96번지) 프리미어플레이스빌딩 14층															/			WWW.seoul.go.kr
전화		3708-8772						/전송			3708-8756					/	p05480548@seoul.go.kr												/	대시민공개