문서번호	방재시설부-8909
결재일자	2019.6.20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		조경시설과장	방재시설부장
김달용		신용우	06/20 이임섭
협 조

『소방행정타운 건립공사(1단계)』

소방관 추모공원 조성 실정보고 검토보고

2019. 6.

도시기반시설본부

(방재시설부)

『소방행정타운 건립공사(1단계)』

소방관 추모공원 조성 실정보고 검토보고

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

소방재난본부의『소방관 추모공원 조성』요청에 따른 건설사업관리단의

추가 시공에 관한 실정보고 사항이 있어 검토하여 보고 드림.

[관련공문 : 소방(CM)제19-183호(2019.06.12)]

Ⅰ		공사개요

○ 위    치 : 은평구 진관동 110-26 일원

○ 규    모 : 연면적 25,174㎡ (지하2층/지상15층 6개동)

□조경공사 : 수목식재(교목1,693주, 관목38,300주), 조경시설 등

○ 기    간 : 2016.05.18 ~ 2019.06.30

○ 도 급 비 : 327억원 (조경 1,158백만원)

Ⅱ		실정보고

○ 추진경위

□‘19.03.06 : 추모공원(설계변경) 공사이행 요청 (소방재난본부 → 도기본)

□‘19.03.21 : 추모공원 설계도서 검토 지시 (건축부 → 건설사업관리단)

□‘19.06.12 : 기술검토의견서(실정보고) 제출 (건설사업관리단 → 건축부)

□‘19.06.18 : 실정보고서 검토 요청 (건축부 → 방재시설부)

○ 보고내용

- 소방재난본부 요청사항으로 소방행정타운 B계곡 입구(극기훈련시설 전면)에

소방관 추모공원 조성 (위치변경 : 당초 특수구조단 입구)

▪조성면적 : 1,093.15㎥

▪소요예산 : 263백만원 (소방재난본부 설계)

※ 서초구 소방학교 충혼탑을 소방행정타운내 소방관 추모공원으로 이전설치

⇒ 소방혼(魂)의 정신 계승

○ 도급비 승인요청                                   (단위 : 원)

구 분	단 위	당 초		변 경		증․감
		수 량	금 액	수 량	금 액
계					263,760,000	263,760,000
토공,콘크리트공	식	-	-	1	52,100,917	52,100,917
조적,석공사	식	-	-	1	85,111,899	85,111,899
목공,금속,미장공	식	-	-	1	25,854,761	25,854,761
조경공, 기타공사	식	-	-	1	24,761,604	24,761,604
제경비	식	-	-	1	75,930,819	75,930,819

Ⅲ		검토보고

○ 충혼탑 위치변경 및 재설계

□당 초 : 특수구조단 동측 부지에 충혼탑 이전 설치

☞ 인조화강석 포장 (조경공사) 및 충혼탑 이전 (건축공사)

□변 경 : 극기훈련시설 입구로 위치변경 및 추모공원으로 조성

☞ 소방재난본부 재설계 (추모공원 상징성 부여, 디자인요소 적용)

- 충혼탑 설치위치(계획) 변경

․부지의 개방감 향상 및 규모 확대 (440㎡⇒1,093㎡)

․추모공간의 상징성 부여

[ 특수구조단 옆(A) ⇒ 극기훈련시설 입구(B) ]	[ 당초(A) : 충혼탑 계획도 ]

[ 서초구 소방학교 충혼탑 : 이전 예정 ]	[ 변경(B) : 추모공원 조감도 ]

○ 설계변경 적용

□추모공원조성은 주관부서의 요청에 의한 설계변경으로 신규비목은

지하복합훈련장 건축공사의 공사비 산출사례를 반영하여 협의율

(91.183%) 적용

☞□시공자의 책임없는 사유에 해당□설계변경 당시를 기준으로 산정한 단가와

동단가에 낙찰율을 곱한 금액을 합한금액의 100분의 50

□제경비 항목은 지하복합훈련장 건축공사 원가계산서 구성비 적용

○ 공사기간 연장검토

□설계변경자문위원회 심의절차 이행 및 추모공원의 완성도 달성을 위한

공기연장 검토가 필요할 것으로 판단됨

☞□소방행정타운 건립공사(1단계)□준공기한 : 2019.06.30.

⇒추모공원 조성공사의 추모공간 기초와 벽체 콘크리트 양생 및 바닥포장면의

다양한 석재 가공과 현장설치, 충혼탑 이설, 기타 부대공 등을 감안하면

▪ 절대공기 약 30일 소요 예상

Ⅳ		보고자 의견

○ 추모공원 조성공사에 대한 건설사업관리단장의 의견이 타당하다고 판단

되어, 제출한 실정보고는 승인조치하고

○ 변경에 따른 공사비 증가 부분은 설계변경위원회의 자문결과에 따라 반영하도록

주무부서(건축부)에 통보하고자 합니다.

붙임 : 1. 추모공원 조성계획도 1부.

2. 책임사업관리자 기술검토 의견서 1부.

3. 관련공문 사본 1부.  끝.

추모공원 조성계획도

추모공원 배치계획

바닥포장 및 시설물 설치