문서번호	문화시설과-5508
결재일자	2019.6.20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		문화시설2팀장	문화시설과장
이덕노		이현	06/20 代박정추
협조
	문화시설과장		박범규

서울연극센터 리모델링 및 증축사업

설 계 공 모  시 행 계 획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 6.

문 화 본 부

(문화시설과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	■	□
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	□	■
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

서울연극센터 리모델링 설계공모 시행계획

서울의 대표적인 문화공간인 대학로에 위치한 서울연극센터 공간 리모델링을 통한 구조 및 기능보강으로 연극인의 교류 및 협업 공간 조성을 위한 설계 공모를 시행하고자 함.

Ⅰ		추 진 개 요

□ 추 진 근 거

○ 서울시 연극발전 종합계획 (2013.11.)

○ 예술청 조성 변경계획 (2018.09.)

○ 서울연극센터 리모델링 추진 기본계획 (2018.11.)

□ 추 진 배 경

○ 노후화가 진행된 서울예술센터 기능개선 필요

- 2015년 정밀안전진단 결과 안전등급 “D”등급으로 보수,보강 필요

○ 기초 공연예술의 공공연습공간 구축이 필요

- 서울시 연극발전 종합계획에 의거 서울연극센터 3층에 입주한 혜화어린이집이 이전됨에 (’16.1월) 따라 건물을 리모델링하고 일부 층을 증축하여 기초공연예술의 공공연습공간으로 활용하기 위함

○  “연극인 허브시설” 조성 필요

- 연극인들의 안정적인 연극활동 기반을 조성하기 위한 정책수립 및 이를 추진하기 위한 구심점 역할 수행

- 컨설팅(정보제공, 일자리, 처우개선 등) 제공 및 커뮤니티 공간구성 등 전반적인 연극인 지원기능 수행

□ 서울연극센터 리모델링 대상지 현황

○ 위    치 : 종로구 대명길3(명륜4가 1번지) (舊 혜화동사무소)

○ 규    모 : 대지 495㎡, 건물 891㎡ (지상3층, 층별 297㎡)

※ 서울문화재단 사용허가 : 2016.1.1.~2018.12.31.(3년)

구 분	계	지상 1층	지상 2층	지상 3층
면적	890.88㎡	296.96㎡ (90평)	296.96㎡ (90평)	296.96㎡ (90평)
용도		∙ 공연정보 안내데스크, 검색대 ∙ 공연홍보 갤러리, 휴게공간 ∙ 도서열람 서가 및 대출서비스 ∙ 티켓박스	∙ 아카데미룸 ∙ 세미나실 ∙ 아카이브룸, 운영사무실	∙ 혜화어린이집 (’16.6 퇴거)

○ 건물현황 : 1965년.9월 준공

○ 건물구조 :  지상3층, 철근콘크리트 구조

○ 도시계획 : 제3종일반주거지역, 문화지구, 지구단위계획구역

□ 추 진 경 위

○  ‘13.11.	서울시 연극발전 종합계획 수립

○  ‘13. 7.~’14. 2.  공간개선 관련 연극인 의견수렴

- 연극인 간담회 개회 (2회)

- 연극 청책토론회 및 서울시 연극발전 종합계획

- 서울연극센터 운영위원회 회의 (2회)

- 주요내용 : 3층 공간 활용방안, 서울연극센터 운영 및 조성방안

· 3층은 창작스튜디오 (연습공간) 조성 필요, 연극단체들이 활용할 수 있는 공간     · 연극인들의 창작활동 지원을 위한 공간 인프라 지원 필요

- 1층은 연극인 소통공간 및 고객과 만나는 공간으로 활용(관객서비스)

○  ‘15. 9.~11.    서울연극센터 시설물 정밀안전진단 용역

- 용역 수행기관 : (사)대한산업안전협회

- 종합평가 등급 : D등급

· 과하중, 부재의 결함, 철근산화, 콘크리트 부식등 노화화 진행 상태

· 안전등급 “D”등급으로 보수 ․보강 없는 증측 및 리모델링 불가

○  ‘16. 5. 17.	서울연극센터 공간개선 공사 기본계획용역

- 예술청 신축사업 타당성조사 및 기본계획 수립용역(용역비 : 22백만원)

- 리모델링 + 증축(20억이상),  신축(38억이상)

○  ‘18. 11. 27.	연극센터 리모델링 추진 기본계획 수립

○  ’18.12.06.   건축사업 적정성 사전검토 (도시기반시설본부)

○  ’19.03.20.   지명설계를 위한 정책심의 (도시공간개선단)

○  ‘19. 2 ~ 4.29 리모델링을 위한 정밀안전진단 (진단결과: D등급)

○  ‘19. 5        지명현상설계를 위한 건축정책위 소위원회

○  ‘19. 6.10    기술용역타당성 심사 (용역비: 152,291천원)

Ⅱ		설계공모 추진계획

□ 설계공모 개요

○ 공 고 명 : 서울연극센터 공간 리모델링 및 증축 설계용역

○ 공고방식 : 지명초청공모 (도시공간개선단 지명 공공건축가 5명 지명)

※ 관련근거  : 서울시 공공건축물 설계발주 기준(도시공간개선단)

○ 설 계 비 : 152백만원

○ 계약방법 :설계공모 당선자와 수의계약(도시기반시설본부 건축부)

※ 지방계약법 시행령 제25조 제1항 제4호 자목

□ 설계공모 추진일정

○ 설계자 지명 : **************************************

○ 현장 설명 : ‘19. 7. 10 (수) 10시 ~ 11시

․장소 : 종로구 대명길3(명륜4가 1번지) (서울연극센터 1층 사업대상지)

○ 질의 접수 : ‘19. 7. 15(월) ~ 7. 16(화) 18:00까지

※메일(dk2605@seoul.go.kr)로만 접수

○ 질의 답변 : ‘19. 7. 19 (금) 메일로 일괄 통보 (별도 서면회신 없음)

○ 작품 제출 : ‘19. 9. 10 (화) 09:00～18:00

(접수처 : 서울시 서소문청사 1동 12층 문화시설과)

○ 작품 심사 : ‘19.  9. 19 (목)  14:00 ~

○ 당선자 발표 : ‘19. 9. 24 (화)

․ 서울특별시 설계공모(http://project.seoul.go.kr) 게시

※ 추진일정은 예정이므로 변경될 수 있으며, 변경 시 별도 통보함

□ 설계공모 심사위원회 구성

○ 심사위원회 구성 : 각 관련분야 전문가 등 5~7명으로 선정

○ 심사위원 선정

-*****************************************

*****************************

- ****************************************

○ 설계공모 입상작품수 및 보상비(15,000천원, 예정설계비 10%이내)

- 서울시 공공건축물 설계발주 기준 (‘15.4.15)

연번	구분	지 급 기 준(인, 천원)								비고
		4명	보상비	3명	보상비	2명	보상비	1명	보상비
1	당선작	-	-	-	-	-	-	-	-	설계권 부여
2	우수작	4/10	6,000	4/10	6,000	4/10	6,000	1/3	5,000
3	가작1	3/10	4,500	3/10	4,500	3/10	4,500
4	가작2	2/10	3,000	2/10	3,000
5	가작3	1/10	1,500

Ⅲ		향후 계획

□ ‘19. 6. ~ 9.	지명설계공모, 심사위원 선정/심사 (5~7인 선정)

□ ‘19. 10.            설계용역 계약 및 착수(도시기반시설본부 건축부)

□ ‘19. 10. ~ ’20.3.  기본 및 실시설계 (6개월)

붙 임 : 1) 설계공모 공고문 1부

2) 설계공모 지침서 1부

3) 설계공모 과업내용서 1부

4) 설계자 및 심사위원 추천(공문) 1부.