문서번호	행정지원과-12552
결재일자	2019.6.20.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	행정관리팀장	행정지원과장
최현곤	김효선	06/20 代김효선
협 조

“상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!”

별관 외벽 보수공사 추진 관련 별관 외벽 하니컴판넬 수량 산출 실측(實測) 결과 보고

2019. 6.

북부수도사업소

【행정지원과】

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	□	■
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□

별관 외벽 보수공사 추진 관련

별관 외벽 하니컴판넬 수량 산출 실측(實測) 결과 보고

별관 외벽 보수공사 설계는 도면을 참고하여 보수공사 면적을 산출하였으나 계약업체의 현장 실측 결과와 상이하여 정확한 공사 면적(하니컴 판넬 수량)을 산출하고자 재실측을 실시하여 보수공사 추진에 만전을 기하고자 함.

□ 공사 개요

○ 공 사 명 : 북부수도사업소 별관 외벽 보수공사

○ 건물구조 : 철근콘크리트조 3층

○ 예산금액 : 97,065천원

○ 계약업체 : ㈜성도강건 정인채

○ 공사기간 : 2019. 6 ~ 7월

□ 수량 산출 실측 배경

○ 당초 외벽 보수공사 면적 산출은 고가장비 등이 없이 실측하지 못하고 2005년 별관 신축 도면을 참고하여 작성 되었으며, 계약업체가 실측시 면적에 차이가

있어(580.27㎡) 계약업체와 공동으로 실측을 재실시함.

□ 실측 결과

○ 실측 일시 : 2019.6.11(화) 10:00

○ 실측 결과

품 명	규 격	단 위	당초물량	변경물량
알루미늄하니컴판넬	1000*1000*1.6T(PVDF)2COAT	㎡	534.00	597.66
강관비계매기	3개월이내	㎡	702.00	764.28

○ 산출근거

￭ 하니컴판넬

▹ 배 면 (18.8X14.8)-(5.7X2.5)-(4.8X2.5X2)-(2.1X0.4)-(0.6X0.4)-(4.8X0.4X2)-(5.7X0.3)-(4.8X1.2)-(1.5X1.2)=225.80

▹ 좌측면

(14.45X14.8)-(5.25X2.5)-(6.6X2.5)-(0.6X1.6X2)-(6.6X1.6)-(2X0.4)-(2X1.2)-(4.9X1.2)=162.68

▹ 우측면

((7.35X17.4)+(1.1X3.6)-(1.5X1.6X2)-(1.5X2.35)-(4.6X3.8))+((6.15X14.8)-(0.6X1.6X4)-(0.6X1.2X2))=191.79

※ 실측 결과 물량은 580.27㎡이나 판넬 소모 부분 3% 가산되어

총물량은 597.66㎡임.

외벽 보수공사 수량 산출 공동 실측 작업

□ 향후계획

○ 물량 증가에 따라 「북부수도사업소 별관 외벽 공사」설계 변경 추진

붙 임 : 실측도면 1부.  끝.