문서번호	방재시설부-8981
결재일자	2019.6.20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		치수시설과장	방재시설부장
한승균		조성만	06/20 이임섭
협 조

서초역~방배로간 도로개설공사 건설폐기물 처리용역

설계변경(총차4회, 4차3회) 검토 보고

2019. 6.

도시기반시설본부

(방재시설부)

서초역~방배로간 도로개설공사 건설폐기물 처리용역

설계변경(총차4회, 4차3회) 검토보고

실정보고 승인에 따른 건설폐기물 발생 물량 증감사항을 설계에 반영하고자 검토 보고함

용역개요

○ 용 역 명 : 서초역~방배로간 도로개설공사 건설폐기물 처리용역

○ 용역기간 : '15.12. 4.~'19. 6.20.(4차 '18.10.22.~'19. 6.20.)

○ 도 급 액 : 501,165,000원(4차 302,519,000원)

○ 도 급 사 : (주)건용환경개발

보고내용

○ 실정보고 승인에 따른 건설폐기물 발생 물량 증감사항을 설계에 반영

- 총차 4회 건설폐기물 성상별 물량 증감내역

구 분		단위	수 량			비고
			당 초	변 경	증․감(△)
○ 서초역~방배로간 도로
폐아스콘 운반 및 처리		ton	15,205	8,049	△7,156
폐아스콘(재활용) 운반 및 처리		ton	1,101	1,282	181
폐콘크리트 운반 및 처리		ton	18,627	13,668	△4,959
혼합건설폐기물 (금속 및 철재류) 처리		ton	132	33	△99
혼합건설폐기물 (혼합폐기물) 운반 및 처리		ton	243	446	203
혼합건설폐기물 (목재방음벽) 운반 및 처리		ton	10.3	-	△10.3
스마트 송장 운영비	폐아스콘 운반	ton	11,674	4,534	△7,140
	폐아스콘(재활용) 운반	ton	1,029	1,211	182
	폐콘크리트 운반	ton	11,711	6,763	△4,948
	혼합건설폐기물 (혼합폐기물) 운반	ton	-	124	124
	혼합건설폐기물 (목재방음벽) 운반	ton	10.3	-	△10.3
○ 민간위탁(명달로방음벽)
폐아스콘 운반 및 처리		ton	-	165	165
폐콘크리트 운반 및 처리		ton	-	136	136
스마트 송장 운영비	폐아스콘 운반	ton	-	165	165
	폐콘크리트 운반	ton	-	136	136

- 4차 3회 건설폐기물 성상별 물량 증감내역

구 분		단위	수 량			비고
			당 초	변 경	증․감(△)
○ 서초역~방배로간 도로
폐아스콘 운반 및 처리		ton	9,469	2,313	△7,156
폐아스콘(재활용) 운반 및 처리		ton	1,030	1,211	181
폐콘크리트 운반 및 처리		ton	11,385	6,426	△4,959
혼합건설폐기물 (금속 및 철재류) 처리		ton	99	-	△99
혼합건설폐기물 (혼합폐기물) 운반 및 처리		ton	5	208	203
혼합건설폐기물 (목재방음벽) 운반 및 처리		ton	10.3	-	△10.3
스마트 송장 운영비	폐아스콘 운반	ton	11,674	4,534	△7,140
	폐아스콘(재활용) 운반	ton	1,029	1,211	182
	폐콘크리트 운반	ton	11,711	6,763	△4,948
	혼합건설폐기물 (혼합폐기물) 운반	ton	-	124	124
	혼합건설폐기물 (목재방음벽) 운반	ton	10.3	-	△10.3
○ 민간위탁(명달로방음벽)
폐아스콘 운반 및 처리		ton	-	165	165
폐콘크리트 운반 및 처리		ton	-	136	136
스마트 송장 운영비	폐아스콘 운반	ton	-	165	165
	폐콘크리트 운반	ton	-	136	136

○ 총차 및 4차 계약금액 변경내역

- 설계변경 내역(총차4회)

구 분		금 액			비고
		당 초	변 경	증․감(△)
총용역비		￦501,165,000	￦351,526,000	△149,639,000
용역비	공급가액	￦455,604,546	￦319,569,091	△136,035,455
	부 가 세	￦45,560,454	￦31,956,909	△13,603,545
	계	￦501,165,000	￦351,526,000	△149,639,000

※민간위탁(명달로방음벽) : 4,570,000원

- 설계변경 내역(4차3회)

구 분		금 액			비고
		당 초	변 경	증․감(△)
총용역비		￦302,519,000	￦152,880,000	△149,639,000
용역비	공급가액	￦275,017,273	￦138,981,819	△136,035,454
	부 가 세	￦27,501,727	￦13,898,181	△13,603,546
	계	￦302,519,000	￦152,880,000	△149,639,000

※민간위탁(명달로방음벽) : 4,570,000원

건설사업관리단 의견

○ 총차분(4회) 및 4차분(3회) 변경은 현장 건설폐기물처리수량 실정산에 따른 폐아스콘, 폐콘크리트, 혼합폐기물 등의 내역물량 조정과 민간위탁공사(명달로 방음벽 철거) 물량 반영이며,

○ 건설폐기물 처리수량 내역 반영 등의 설계변경 도서가 적정하게 작성된 것으로 판단됨.

보고자 의견

○ 건설사업관리업무수행지침에 따라 설계변경 및 계약금액 조정사항을 승인처리하며, 계약부서에 변경내용을 통보하여 계약업무 후속절차를 시행하고자 함.

붙임 : 1. 건설사업관리단 검토의견서 1부.

2. 설계변경 내역서(총차4회, 4차3회) 각1부.  끝.