＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	상수도사업본부
수신자	내부결재
(경유)
제 목	기술용역 설계변경 시행『상수도공사 강북지역 건설사업관리용역(장기계속)』- 최종

1. 우리본부에서 시행중인『상수도공사(급수·누수복구·시설물) 강북지역 건설사업 관리용역(장기계속)』에 대하여 아래와 같이 설계변경(최종) 시행코자 합니다.

가. 용 역 명: 상수도공사(급수·누수복구·시설물) 강북지역 건설사업관리용역(장기계속)

나. 용역기간: 2017.6.22.~2019.6.21.

다. 예산과목: 상수도사업비, 영업비용, 급수공사비, 신설공사비(감리비)

상수도사업비, 영업비용, 배급수비, 수선교체비(감리비)

자본적지출, 유형자산취득, 구축물(노후밸브정비), 시설비및부대비(감리비)

라. 계 약 자: *********************

마. 설계변경 금액                                                       (단위: 원)

구 분	당 초	변 경	증‧감	용역기간
총 부기 금액	6,316,541,000	6,405,311,000	증)88,770,000
1차수 금액	1,574,892,000	1,574,892,000	-	(2017. 6.22.~2017.12.31)
2차수 금액	3,236,618,000	3,236,618,000	-	(2018. 1. 1.~2018.12.31)
3차수 금액	1,505,031,000	1,593,801,000	증)88,770,000	(2019. 1. 1.~2019. 6.21)

바. 설계변경 사유

- 계약물량 변동에 의한 설계변경

붙임 1. 설계변경 사유서 1부.

2. 설계변경 심사결과 통보서 공문 1부.

3. 설계변경 내역서 1부.

4. 합의서 1부.  끝.

주무관							박행종				급수설비과장					유동수					급수부장					신용철					상수도사업본부부본부장						06/20 代이상국
협조자				주무관							박상진					시설관리과장							代성기옥					누수방지과장								이용구
시행			급수설비과-5831										(						)		접수												(						)
우	03741					서울특별시 서대문구 서소문로 51 (합동) (상수도사업본부 급수부 급수설비과)																/
전화		02-3146-1474							/전송			02-3146-1429					/	p2net@seoul.go.kr													/	부분공개(7)