문서번호	생태환경과-1335
결재일자	2019.6.21.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		생태환경과장	공원부장
김정화		최병언	06/21 김인숙
협조

- 2019년 난지이용숲 조성사업 -

공사현장 실정보고에 대한 검토보고

2019. 6.

- 2019년 난지이용숲 조성사업 -

공사현장 실정보고에 대한 검토보고

한강의 자연성을 회복하고자 시행중인「2019년 난지이용숲 조성사업」과 관련하여 서울시설공단의 공사현장 실정보고에 대하여 아래와 같이 검토하여 사업추진에 만전을 기하고자 함.

※ 공사감독3처-4365(2019.06.10.),-4700(2019.06.18) 공사현장 실정보고서(1차,2차) 승인요청

▢ 공사개요

○ 공 사 명 : 2019년 난지이용숲 조성사업

○ 위    치 : 난지한강공원(야구장 인근)

○ 공사기간 : 2019. 4. 17 ~ 7. 15

○ 공사내용 : 수목식재(측백나무 외 13종 468주), 수목생육환경개선 등

○ 도 급 비 : 금245,974,300원

○ 도 급 자 : 에코그린㈜ 대표 이정은

▢ 현장실정 사항

구 분	현황 및 문제점	서울시설공단 검토결과	승인여부
식 재	○ 사토처리가 인근 사토장(5km)으로 설계되었으나 사토반출 시기가 맞지 않고 현장여건상 현장내 적치가 곤란	○ 객토시 발생하는 불용토사(637.84㎡)전량을 토사 재활용이 가능한 수도권매립지로 사토장 위치 변경 ▸인근사토장(5km)→수도권매립지(33.06km)	승 인
	○ 설계반영된 플랜터에 식재될 느릅나무를 한강에서 생육이 좋은 참느릅나무로 변경	○ 현장여건에 맞게 수종 변경 ▸느릅나무(H4.5×R20) 12주 → 0주 ▸참느릅나무(H4.5×R20) 0주 → 12주	승 인
	○ 제거예정 수목중 생육이 양호한 수목은 이식으로 변경	○ 현장여건에 맞게 이식물량 변경 ▸느티나무 이식(R30) 2주 → 5주	승 인

구 분	현황 및 문제점	서울시설공단 검토결과	승인여부
식 재	○ 식재공간 및 수목규격에 맞게 지주목 변경	○ 현장여건에 맞게 지주목 재질(방부활생목→원주목) 및 규격변경 ▸측백나무: 삼발이지주목→연계형지주목(대나무) ▸참느릅나무(R20): 사각지주목→삼발이지주목(L2700) ▸메타세콰이어, 낙우송: 삼발이지주목(L2700)→(L1800)	승 인
	○ 이식예정인 조팝나무의 생육상태가 불량하여 제거후, 조팝나무 신규식재	○ 현장여건에 맞게 식재수량 조정 ▸조팝나무(H1.0) 이식 150주 → 0주 ▸조팝나무(H1.0) 제거 0주 → 150주 ▸조팝나무(H0.8×W0.4) 0주 → 1,000주	승 인
	○ 객토를 위한 터파기시 하부가 양질의 모래층일 경우 자갈깔기가 불필요하여 터파기 물량조정 불가피 ※ 자갈깔기는 측백나무, 메타세콰이어 식재구간만 시행	○ 현장여건에 맞게 자갈 및 터파기 물량 변경 ▸자갈 206.34㎥ → 64.99㎥ ▸터파기 및 잔토처리 637.84㎥ → 521.42㎥	승 인
안 전 (부대공)	○ 공원이용객 및 작업자 안전관리를 위한 가림막휀스 설치필요	○ 가림막휀스 설치 반영 ▸가림막휀스(2.1×1.1m) 0경간 → 200경간	승 인

▢ 계략 공사비 : 금255,610천원(증9,636천원)

구 분		금 액(천원)			비 고
		당 초	변 경	증 감
도급비	계	245,974,300	255,610,000	9,635,700
	공급가액	223,613,000	232,372,727	8,759,727
	부가가치세	22,361,300	23,237,273	875,973

▢ 보고자 검토의견

○ 위와 같이 승인 통보하여 선 시공후 추후 설계변경 시행 등 공사시행에 철저를 기하고자 함.

붙임 : 공사현장 실정보고서 승인요청 공문(1차, 2차) 각 1부. 끝.