문서번호	시설관리과-15981
결재일자	2019.6.21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장
유형근	김상웅	06/21 허준행
협 조

「2018년 평창동등 8개동 상수도공사(장기계속)」

설계변경(3차최종) 심의위원회 개최 결과 보고

2019.06.

중부수도사업소

(시설관리과)

「2018년 평창동등 8개동 상수도공사(장기계속)」

설계변경(3차,최종) 심의위원회 개최 결과 보고

우리 사업소에서 시행 중인 『2018년 평창동등 8개동 상수도공사(장기계속)』에 대한  설계변경(3차,최종) 심의위원회를 개최하고 결과를 보고 드림

□ 공사현황

○ 공 사 명 : 2018년 평창동등 8개동 상수도공사(장기계속단가계약)

○ 공사개요 :

구분	구경	연장	증․감
당초	13㎜ ~ 300㎜	1,048m
변경	13㎜ ~ 300㎜	1,112m	증 91m

○ 공사기간 : 2018.5.10. ~ 2019.06.30.

○ 수 급 인 :*******************

□ 설계변경 사유

○ 공사중 물량 증․감 사항 발생

- 물량증가 : 터파기(기계100%) 불량 (굴삭기 0.18㎥) 등 133개 공종

- 물량감소 : 터파기(기계100%) 불량 (굴삭기 0.6㎥) 등 316개 공종

○ 신규공종 및 신규자재 발생

- 신규공종 : 관보온(발포에틸렌보온재) 등 4개 공종

○ 공사금액

구분	설계변경 현황(원)		증․감
	당초	변경
총부기금액	***********	***********	*********
금차(2차) 계약금액	**********	**********	*********

□ 심의위원회 개최

○ 심의 일시 : 2019.06.21.(금) 09:30

○ 참 석 자 : 시설관리과장, 6급 김상웅, 6급 이유찬, 6급 김종수

6급 박장진, 6급 유명수

○ 제    목 : 물량증감에 따른 설계변경 적정성 검토

- 물량이 증․감한 일부공종에 대해 계약율을 적용

- 도급액 범위 내에서 물량변동

- 신공종에 대해 낙찰율을 적용

□ 설계변경 심의위원회 검토 결과

○ 설계변경 타당성 : 타당함

○ 신규공종 및 계약변동(증․감)물량 계약단가 적정 적용여부 : 적정

○ 제잡비 적정 산정 및 적용 적성성 : 적정

○ 각종 제반규정 준수여부 : 준수

□ 행정사항

○ 설계변경 시행 후 우리사업소 행정지원과에 설계변경(최종) 계약 의뢰

붙임 : 1. 설계변경 심의완료의견서 1부.

2. 설계변경 제비율 검증 1부.

3. 설계변경 내역서 1부.  끝.