문서번호	토목부-11036
결재일자	2019.6.21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		도시고속도로과장	토목부장
서민석		代박운용	전결 06/21 代박일연
협조
	주무관		박운용

설계변경(전체32회,15차1회) 검토보고 [강남순환도시고속도로(4공구) 건설공사]

2019. 6.

도시기반시설본부

(토 목 부)

설계변경(전체32회,15차1회) 검토보고

[강남순환도시고속도로(4공구) 건설공사]

본 공사 건설사업관리단으로부터 실정보고를 반영한 시설공사 설계변경(전체32회, 15차1회)요청이 있어 검토보고 드림.

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 강남순환도시고속도로(4공구) 건설공사

○ 규    모 : 도로개설 폭 4~8차로, 연장 2.48km

○ 계약금액 : 198,370백만 원(15차 22,678백만 원)

○ 공사기간 : `01.12.29~`19.11.30 (15차 `19. 1. 9.~ 11. 30.)

○ 시공사/건설사업관리단 : 롯데건설/(주)서영엔지니링

□ 설계변경 내용

가. 설계변경(전체 32회, 증 1,546백만 원) 주요사항

○ 교통운영 구간 제설대책(2018년) 추진 : 증) 73백만 원

- 토목부-19921(`18.11.26) 실정보고 승인

○ 금하지하차도 비개착공법구간 보강그라우팅 : 증) 290백만 원

- 토목부-20157(`18.11.29) 실정보고 승인

○ 금하지하차도 공사중 임시조명시설 변경 : 감) 24백만 원

- 토목부-6137(`19.4.10) 실정보고 승인

○ 물가변동(E/S)으로 인한 계약금액 조정 : 증) 959백만 원

- 토목부-5857(`19.4.8) 실정보고 승인

○ 시설공사 준공기한 연기 : 6개월

- 토목부-5688(`19.4.4) 검토보고(시설국장)

나. 계약변경 내역

(단위 : 원)

구 분		당 초	변 경	증 ․ 감
공사 기간	전체(32회)	2001.12.29~2019.11.30	2001.12.29~2020.05.31	6개월
	금회(15차1회)	2019.01.09~2019.11.30	2019.01.09~2019.12.31	1개월
도급액	전체(32회)	198,370,000,000	199,916,000,000	1,546,000,000
	금회(15차1회)	22,678,490,000	22,678,490,000	-

다. 주요 변경사항

○ 전체32회

공 종	변경 사항	당 초	변 경	증,감	비고
개통구간 제설대책	추가		- 제설삽날+살수차량 운영(4개월): 1 대 - 액상제설제 : 60 ton - 상황대기 및 제설관리 : 1 식	72,800,000
비개착구간 보강그라우팅 반영	추가		- 파이프설치 홀뚫기 : 222 개 - 파이프박기(L=1.8m) : 222 개소 - 파이프박기(L=1.2m) : 444 개소 - 그라우팅 : 659 ㎥ - 기계기구설치 및 해체 : 6 회 - 플랜트설치 및 해체 : 7 회	290,000,000
계약금액조정실태 순회점검지적 반영	추가		- 지적사항 조치반영 : 1 식	- 1,700,000
금하지하차도 유출지하수처리비 반영	추가		- 계량기 설치비 : 1 식 - 하수도사용료 : 344 일	45,540,000
금하지하차도 비개착구간 측벽강관 토질변경	변경	- STS강관추진(토사) 220 m	- STS강관추진(토사) : 73 m - STS강관추진(자갈섞인 토사) : 147 m	49,000,000
물가변동으로인한 계약금액 조정	추가		- 물가변동(15회) : 1 식	959,086,000
호암대교 방호벽 시인성개선 도장	추가		- 호암대교 및 RAMP교 : 3,098 m - 공사중 차량유도 교통시설 : 1 식	21,800,000
기계설비공사 설비부조정 반영	추가		- 기계설비공사 설비비조정 : 1 식	- 7,600,000
설계내역서 수량 불일치 정정	변경	- PC개거 165 m - 콘크리트타설 12,250㎥	- PC개거 : 109 m - 콘크리트타설/(0~15m기초): 17,250 ㎥	- 19,500,000
금하지하차도 매립폐기물 처리	추가		- 폐기물 상차 : 7,558 ton - 폐기물 선별 : 18,435 ㎥	48,500,000
합 계				1,546,556,000

○ 차수공사 설계변경(15차 1회) : 차수 준공금액에 맞추어 내역 변경

라. 공사비 증·감 현황 (전체32회)

(단위 : 원)

공 종	수량	단위	전 체			비 고
			당 초	변 경	증·감
강남순환도시고속도로(4공구)건설공사			198,370,000,000	199,916,000,000	1,546,000,000
공 통 공 사	1	식	7,758,847,485	7,808,941,707	50,094,222
토 목 공 종	1	식	123,932,738,009	124,223,669,385	290,931,376
남북간 연결도로	1	식	3,845,319,034	3,940,981,095	95,662,061
한신아파트 보도육교 개선공사	1	식	423,194,345	423,194,345	-
기아대교 철거 및 신설공사	1	식	6,306,106,563	6,306,106,563	-
직 접 공 사 비	1	식	142,266,205,436	142,702,893,095	436,687,659
간 접 노 무 비	1	식	7,179,948,000	7,201,525,000	21,577,000
산 재 보 험 료	1	식	1,947,890,000	1,953,682,000	5,792,000
고 용 보 험 료	1	식	658,042,000	660,035,000	1,993,000
건 강 보 험 료	1	식	118,726,000	120,008,000	1,282,000
노인장기요양보험료	1	식	7,743,000	7,828,000	85,000
연금보험료	1	식	166,002,000	167,878,000	1,876,000
퇴직공제부금비	1	식	234,881,000	236,300,000	1,419,000
산업안전보건관리비	1	식	2,277,192,000	2,283,160,000	5,968,000
기 타 경 비	1	식	5,506,717,000	5,521,297,000	14,580,000
공사이행보증수수료	1	식	1,383,367,000	1,383,695,000	328,000
건설하도급대금지급보증발급수수료	1	식	48,001,000	48,148,000	147,000
간 접 공 사 비	1	식	19,528,509,000	19,583,556,000	55,047,000
일 반 관 리 비	1	식	2,193,898,000	2,200,554,000	6,656,000
이 윤	1	식	1,030,391,752	1,034,172,639	3,780,887
도로점용교통처리용역	1	식	268,709,750	268,709,750	-
안 전 점 검 비	1	식	554,887,548	554,887,548	-
환경영향조사비	1	식	500,000,000	500,000,000	-
교통안전시설물 실시설계용역	1	식	63,499,000	63,499,000	-
교통안전시설물 감리용역	1	식	15,546,400	15,546,400	-
석면조사용역	1	식	48,415,000	48,415,000	-
석면폐기물처리비	1	식	109,300,000	109,300,000	-
지장전주이설(이전비포함)	1	식	42,409,923	42,409,923	-
임목폐기물처리	1	식	26,604,620	35,679,620	9,075,000
건물조사비	1	식	73,700,000	73,700,000	-
수도원인자부담금-퇴수	1	식	10,955,230	15,455,230	4,500,000
사면안정검토비	1	식	20,892,439	20,892,439	-
공사손해보험료	1	식	1,999,974,100	1,999,974,100	-
건설기계대여금지급보증수수료	1	식	65,431,000	66,043,000	612,000
오수처리시설 폐쇄	1	식	3,200,170	3,200,170	-
금하지하차도 유출지하수처리비	1	식	-	41,400,000	41,400,000
금하지하차도CCTV 운영	1	식	-	23,300,000	23,300,000
물 가 변 동	1	식	11,222,703,726	12,047,099,726	824,396,000
공 급 가 액	1	식	180,336,363,636	181,741,818,182	1,405,454,546
부가가치세	1	식	18,033,636,364	18,174,181,818	140,545,454
총 공 사 비			198,370,000,000	199,916,000,000	1,546,000,000

마. 건설사업관리단 검토의견

○ 본 공사의 설계변경(전체32회, 15차1회) 적정성 검토결과 적정한 것으로 판단됨.

□ 조치계획

○ 건설사업관리단 검토의견과 같이 설계변경 내용이 적정하므로

계약상대자와 변경계약 체결코자 함.

붙임 : 건설사업관리단 검토의견서 1부.  끝.