＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	중부수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	설계변경(3차,최종) 시행(2018년 평창동등 8개동 상수도공사)

1. 우리사업소에서 시행하고 있는 『2018년 평창동등 8개동 상수도공사(장기계속단가계약)』에 대하여 아래와 같이 설계변경(3차,최종)을 시행코자 합니다.

가. 공 사 명 : 2018년 평창동등 8개동 상수도공사(장기계속단가계약)

나. 도 급 자 :*****************

다. 계약기간 : 2018.05.10. ~ 2019.06.30.

라. 설계변경 내용 : 물량 증․감 및 부기금액 변경

마. 설계변경 내역                                                     (단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	비 고
총 부기금액	***********	***********	***********
1차 부기금액	***********	***********	*
2차 부기금액	***********	***********	***********

바. 차수별 계약금액 변경사유 : 시공물량 증․감 및 신공종 발생 등으로 각 차수 금액의 변동요인 발생

사. 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 급.배수공사비, 신설공사비

상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선교체비

자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비

상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선유지교체비

붙임 : 1. 설계변경 심의위원회 결과보고 1부.

2. 설계변경 내역서 및 합의서등 1부.  끝.

주무관	유형근		시설관리팀장	김상웅		시설관리과장	허준행		중부수도사업소장	06/21 황일람
협조자	주무관	김영빈
시행	시설관리과-16021	(		)	접수		(		)
우	04605	서울시 중구 장충단로 88 중부수도사업소 시설관리과	/
전화	02-3146-2192	/전송	3146-2239	/	bandyyhk@seoul.go.kr	/	부분공개(5)