문서번호	정수과-6987
결재일자	2019.6.21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	암사아리수정수센터소장
안영환		하은경	06/21 유성종
협조
	주무관		변민용

배출수처리시설 운영관리 용역 변경계약 추진 계획(2)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 6.

정수과

배출수처리시설 운영관리 용역 변경계약 추진 계획(2)

배출수처리시설 용역근로자 정규직 전환이 확정됨에 따라 「배출수처리시설 운영관리 용역」의 계약기간 연장 사유가 발생되어 다음과 같이 변경계약을 추진하고자 함

□ 관련 근거

○ 공공부문 비정규직 전환에 따른 용역계약 연장 및 고용승계 요청

(노동정책담당관-12878, 2017. 12. 7.)

○ 정수센터 배출수처리용역 근로자 공무직 전환 확정에 따른 전환계획 알림(생산관리과-6018, 2019. 6. 11.)

□ 용역계약 현황

○ 건    명 : 암사 배출수처리시설 운영관리 용역(장기계속)

○ 계약업체 : 태일환경관리(주)

○ 계약기간 : 2015. 9. 1 - 2019. 6. 30(3년10월)

○ 총 용역 부기금액 : ￦1,703,603,000원(금차￦278,322,000원)

□ 변경계약 내역

○ 계약기간 변경 : 1개월 연장

- 당초 : 2015. 9. 1 ~ 2019. 6. 30(3년10월)

- 변경 : 2015. 9. 1 ~ 2019. 7. 31(3년11월)

○ 계약금액 변경내역                                          (단위:원)

구 분		당 초	변 경	증 감	비 고
총용역부기금액		1,703,603,000	1,749,990,000	증46,387,000
차수별	1차년도 (`15.9.01-12.31)	101,629,000	101,629,000	기정산
	2차년도 (`16.1.01-12.31)	304,546,000	304,546,000	기정산
	3차년도 (`17.1.01-12.31)	471,339,000	471,339,000	기정산
	4차년도 (`18.1.01-12.31)	547,767,000	547,767,000	기정산
	5차년도 (`19.1.01-02.28)	278,322,000	324,709,000	증46,387,000

□ 향후 일정

○ 2019. 6. 24 : 변경계약 의뢰 (행정관리과)

○ 2019. 6. 25 : 전환 대상자 서류 징구 및 결격사유조회

○ 2019. 7. 10 : 전환 대상자 심사위원회 개최 및 확정

○ 2019. 7. 30 : 신규채용자(본부) 및 전환 대상자 공무직 계약 체결

○ 2019. 8.  1 : 배출수처리시설 근무시작

붙 임 : 1. 생산부 관련공문  1부.

2. 합의서1부.

3. 변경 내역서1부.  끝