투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신자	총무과장
(경유)
제 목	설계변경 계약 요청(잠원 한강공원 노후 보행로 정비공사)

우리과에서 시행중인 『잠원 한강공원 노후 보행로 정비공사』에 대하여 아래와 같이 설계변경 하였기에 변경계약 요청합니다.

1. 공 사 명 : 잠원 한강공원 노후 보행로 정비공사

2. 공사기간 : 2019. 3. 18. ~ 2019. 09. 13.

3. 시 공 사 : 대부건설(주)  대표 정은미

4. 변경사유 : 신규물량 및 공종별 물량 증.감

5. 변경금액

구 분	당 초	변 경	증. 감	비 고
총공사비	744,779,000	800,000,000	증)55,221,000
도 급 비	358,579,000	430,826,800	증)72,247,800
관급자재	314,800,000	351,518,400	증)36,718,400
이 설 비	71,400,000	17,654,800	감)53,745,200

붙 임 : 1. 설계변경 시행보고서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.

3. 계약금액 검증서 1부.  끝.

	시설관리과장
주무관	한상신		시설관리과장	06/21 代김연배
협조자
시행	시설관리과-1600	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-772-7135	/전송	02-772-7304	/	hansang7272@seoul.go.kr	/	대시민공개