＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	상수도사업본부
수신	내부결재
(경유)
제목	용역 변경 계약 체결-상수도공사(급수,누수복구,시설물) 강북지역 건설사업관리용역(장기계속) 3차

1. 급수설비과-5858호(2019.6.20.)와 관련입니다.

2.‘상수도공사(급수,누수복구,시설물) 강북지역 건설사업관리용역(장기계속) 3차’건의 계약상대자와 아래와 같이 변경 계약을 체결하고자 합니다.

가. 건명 : 상수도공사(급수,누수복구,시설물) 강북지역 건설사업관리용역(장기계속) 3차

나. 계약상대자 : *************

다. 계 약 기 간 : 2018.12.28.~ 2019.6.21.

라. 계 약 금 액 : 금1,505,031,000원(금일십오억오백삼만일천원)

마. 변 경 내 용 : 계약금액 변경

(단위 : 원)

구분	당초	변경	비고
총계약금액	6,316,541,000	6,405,311,000	증)88,770,000
금차계약금액	1,505,031,000	1,593,801,000	증)88,770,000

바. 변 경 사 유

- 계약물량 변동에 의한 설계변경

붙임: 용역변경계약서(초안) 및 관련서류 각 1부.  끝.

주무관	박상진		재무회계과장	김분숙		요금관리부장	조두업		상수도사업본부부본부장	06/21 代이상국
협조자
시행	재무회계과-8644	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51 3층 (합동)	/
전화	02-3146-1231	/전송	02-3146-1209	/	chadol2000@seoul.go.kr	/	부분공개(7)