문서번호	행정지원과-12725
결재일자	2019.6.24.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	행정관리팀장	행정지원과장		북부수도사업소장
최현곤	김효선	代김효선		06/24 박병권
협 조
	주무관		구명임

“상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!”

북부수도사업소 별관 외벽 보수공사 설계 변경 계획

2019.  6.

북부수도사업소

【행정지원과】

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□

북부수도사업소

별관 외벽 보수공사 설계 변경 계획

우리사업소에서 시행중인 □북부수도사업소 별관 외벽 보수공사□와 관련하여 산출 물량 증가에 따른 설계변경을 시행하고자함.

1. 공사개요

가. 공 사 명 : 북부수도사업소  별관 외벽 보수공사

나. 계약기간 : 2019. 05. 17. ~ 2019. 06. 24

다. 계약금액 : ************************

라. 도 급 자 : ***************

2. 설계변경

가. 변경사유

○ 별관 외벽 면적 실측 결과 보수공사 면적 증가로 그에 따른 하니컴판넬 및

강관비계매기 물량 증가

나.  변경내역

○ 물량 증가에 따른 산출내역서

공 종	단위	원가계산서
		당초	변경	증감
재료비		1,531,700	1,615,778	84,078
노무비		13,976,481	14,788,930	812,449
경 비		3,188,577	3,302,461	113,884
소계		18,696,758	19,707,169	1,010,411
일반관리비		1,121,805	1,182,430	60,625
이윤		2,740,346	2,890,949	150,603
하니컴판넬		65,682,000	73,512,180	7,830,180
공급가액		88,240,909	97,292,728	9,051,819
부가가치세		8,824,091	9,729,272	905,181
도급액		97,065,000	107,022,000	9,957,000

○ 금액변경 : 증9,957,000원(당초 97,065,000원 ⇒ 변경 107,022,000원)

○ 금액변경 사유

- 재료비(강관비계매기), 노무비, 경비, 알루미늄하니컴판넬(시공비포함), 일반

관리비 등 증액

다. 물량 증가에 따른 공사기간 연장

○ 변경내역

- 당 초 : 2019. 05. 17 ~ 2019. 6. 24

- 변 경 : 2019. 05. 17 ~ 2019. 7. 12

○ 공사기간 변경 사유

- 물량증가에 따른 알루미늄하니컴판넬 주문 제작기간 연장

3. 조치계획

가. 사업소 자체 심의 후 금액 증가 및 계약기간 연장에 따른 설계변경을 시행코자 함

○ 자체심의 소위원회 개최

- 일  정 : 2019.06.21. 15:00

- 장  소 : 행정지원과 회의실

- 위원장 : 행정지원과장

- 위  원 : 시설관리6급 박상규, 시설6급 박미영, 시설6급 이문성, 시설7급 박상권

붙임 : 1. 별관외벽 허니컴판넬 수량 산출 실측 결과 보고 1부.

2. 설계변경내역서(물량증감 내역포함) 1부.  끝.