문서번호	행정운영과-7670
결재일자	2019.6.24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		행정운영과장	경영관리부장
장태옥		代구경모	06/24 이상국
협조

「본부 청사 내진보강공사」

실정사항 보고에 대한 검토결과 보고

2019. 6.  .

경 영 관 리 부

(행정운영과)

「본부 청사 내진보강공사」

실정사항 보고에 대한 검토결과 보고

「본부 청사 내진보강공사」시공사로부터 본부장·부본부장실의 변색된 천장재 교체시공 방안에 대한 실정보고가 제출되어 검토하고 그 결과를 보고 드림.

□ 공사개요

❍ 사 업 명 : 상수도사업본부 청사 내진보강공사

❍ 공사기간 : 2019. 4.5.~8.2.(120일)  ※ 계약일 : 2019.3.28.

❍ 계약금액 : **********

❍ 시 공 사 : *****************************

❍ 사업내용 : 캔틸레버 댐퍼 20개소 설치, 내부 수장공사 및 균열보수

❍ 기술감리 : *****************

***********************

□ 실정보고 사항

❍ 2층 실내 천장 마감재 교체 시공

공사대상에서 제외된 본부장·부본부장실 천장재에 대하여 사무실 미관을 고려하여 전면 교체시공 방안 제시

❍ 교체 물량 증감 발생

당초 설계	실정 사항
당초 댐퍼설치 위치만 천장재(마이톤 603×603) 교체시공 설계 (설계물량 : 25㎡)	본부장실 등 내부 사무실 미관개선을 위하여 전면교체 필요 (약 142㎡ 추가물량 증가)

□ 검토결과

❍ 현행 문제점

2007년도에 시공된 본부장실 등 천장재(603×603)가 장기간 경과로 색상이 심하게 변색, 오염된 상태임

- 대  상  : 약 167㎡(본부장실, 부본부장실, 부속실)

본부장실 천장(변색됨)	부속실 주변(변색됨)

❍ 조치계획 : 천장재(603×603) 전체 교체

- 범    위 : 본부장실, 부본부장실 내부 천장(167㎡)

- 작업방법 : 기존 경량철골(M-BAR)은 재활용 공사시행

□ 향후계획

❍ 본부장실, 부본부장실 천장재 교체 작업지시

❍ 향후, 추가물량에 대한 설계변경 조치하여 공사비 정산

- 공사물량 : 기존 25㎡ → 변경 167㎡(추가 142㎡)

따로 붙임 : 상수도본부 내진보강공사 실정보고서 1부.  끝.