문서번호	인력개발과-14055
결재일자	2019.6.24.
공개여부	부분공개(5 6)
방침번호

			시 민
주무관		인재노무팀장	인력개발과장
전성민		권소현	06/24 김기봉
협조
	주무관		김형태

서천연수원 식당 채광조절 롤스크린 설치계획

2019. 6.

행   정   국

(인력개발과)

서천연수원 식당 채광조절 롤스크린 설치계획

서천연수원 식당 내 설치된 천창 및 커튼월의 강한 햇빛으로 지속적인 식사불편민원이 제기되어 유리면에 채광조절이 가능한 롤스크린을 설치하고자 함

※ 2019년 인재개발원 신규자 교육시 식당 천창의 강한 햇빛으로 식사불편 민원 지속 제기

□ 추진배경

○ 필요성

- 서천연수원 식당 천창 및 외부 커튼월로 직사광선이 유입되어 식사중 눈부심 및 불쾌감 등의 지속적인 민원이 제기되고 있음

- 식당의 쾌적성 확보를 위해 채광조절이 가능한 롤스크린 설치 필요

○ 현황사진

커튼월 천창	천창 커튼월
식당사진(천창, 커튼월 유리)	식당사진(천창, 커튼월 유리)

□ 추진방법

○ 천창 부분 : 공사계약 / 전동 롤스크린 설치공사

- 천정고가 높아 유지관리에 용이한 전동 롤스크린 설치

- 천창 전동 롤스크린(금속구조물)의 견고한 설치를 위해 전동 롤스크린 생산 및 설치 면허를 갖춘 업체와 공사계약 추진(안전사고 예방)

※ 전문건설업면허 : 금속구조물‧창호‧온실공사업

※ 전동 롤스크린 조달물품 없음, 중소기업 경쟁제품 비해당

○ 외벽 커튼월 부분 : 조달구매(3자단가) / 수동식 롤스크린 설치

- 수동으로 조작이 가능한 위치로 가격이 저렴한 수동식 롤스크린 설치

- 연수원 이용 특성상 ‘어린이보호용 제품’으로 설치

※ 어린이보호형 : 만7세이하 어린이가 활동할 수 있는 장소에 설치되는 유형으로 ‘롤스크린 조절줄’이 일정 하중을 받을 경우 롤스크린에서 분리되어 사고방지 역할

□ 공사발주 계획

○ 공 사 명 : 서천연수원 식당 천창 전동 롤스크린 설치공사

○ 공사규모 : 전동 롤스크린 39㎡, 고정 스크린 12㎡ 설치

전동모터 (4개)	전동 스크린
전동 롤스크린 설치계획도	전동 롤스크린 설치계획 이미지

고정 스크린

○ 공사기간 : 착공일로부터 25일

○ 입찰방법 : 수의계약(1인 견적)

- 근거법령 : 지방계약법 시행령 제25조 제1항 제5호 및 제30조 제1항 제2호

- 사    유 : 추정가격 2천만원 이하 소액 공사계약으로 동일 규격 최저가 금액을 제시한 업체 선정

○ 계약업체 선정 : ****

- 선정방법 : 동일 규격으로 견적금액을 최저가로 제시한 업체 선정

구 분	****	********	*****	********
견적금액	***********	**********	***********	***********

○ 소요예산 : ****************************

○ 예산과목 : 정책)인적자원 역량강화, 단위)수련원관리 사업, 세부)
연수원 운영, 편성목)시설비 및 부대비, 통계목)시설비

□ 조달 물품구매(3자단가)

○ 구 매 명 : 서천연수원 식당 커튼월 롤스크린 구매

○ 품    명 : 수동식 롤스크린(롤업셰이드)

○ 규    격 : **************************************************************************

○ 구매방법 : 조달구매(3자단가)

○ 구매수량 : 107㎡(외벽 커튼월 면적=길이×높이)

- 산출식 = (13.77m+13.79m+6.62m) × 3.13m = 106.98㎡

○ 소요예산 : ***************************

**************************************

**************************************

○ 예산과목 : 정책)인적자원 역량강화, 단위)수련원관리 사업, 세부)
연수원 운영, 편성목)시설비 및 부대비, 통계목)시설비

□ 향후계획

○ 2019.06. : 공사계약 및 물품구매 의뢰

○ 2019.06. : 계약 및 착공

○ 2019.07. : 공사완료

붙 임  1) 산출기초조사서 및 견적서(전동롤스크린 설치공사) 각1부.
2) 설계도면 및 시방서(전동롤스크린 설치공사) 각1부.
3) 천창 전동롤스크린 설치 제안서 2부.
4) 조달물품(수동식 롤스크린) 제품상세정보 1부. 끝.