문서번호	설비부-9465
결재일자	2019.6.24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	시책사업과장	설비부장
김수진	代박갑임	06/24 임정규

『서울시 근로자복지관 증축 통신공사』

설계변경(정산) 검토보고

2019. 6.

도시기반시설본부

(설 비 부)

『서울시 근로자복지관 증축 통신공사』

설계변경(정산) 검토보고

『서울시 근로자복지관 증축 통신공사』와 관련하여 서울시설공단으로부터 제출된 설계변경(정산)에 대하여 검토하고 보고 드림

1		공사현황

공사개요

❍ 사 업 명 : 서울시 근로자복지관 증축 통신공사

❍ 공사위치 : 영등포구 국회대로44길 10

❍ 공사규모 : 지하1층/지상5층(지상5층 리모델링 및 1개층 수직증축)

❍ 주요설비 : 방송설비공사, AV설비공사, TV 및 LAN설비공사 등

❍ 공사기간 : 2018.10.29.~2019.06.28.

❍ 공 사 비 : 158백만원(도급비 81백만원, 관급비 77백만원)

❍ 위탁감독 : 서울시설공단

❍ 시 공 사 : ㈜헤로스테크

2		검토내용

관련근거

❍ 설계변경(정산) 보고서 제출[서울시설공단-4864호(2019.06.21.)]

설계변경 주요내용

❍ 설계변경 사유

- 주관부서 추가공사 요청사항 반영
- 현장여건 반영에 따른 물량 증·감

- 준공에 따른 제경비 정산(건강보험료, 연금보험료, 노인장기요양료 등)

❍ 설계변경 주요내용

연번	공 종	내 용	공 사 비			비고
			당 초	변 경	증, 감(-)
1	전화 및 LAN설비	광케이블 지중화 및 랙장비 설치	13,977,624	20,986,063	7,008,439
2	TV설비	현장여건 반영	4,855,493	4,688,793	166,700
3	방송설비	주관부서 요청사항 반영(비상방송)	12,837,168	22,782,915	9,945,747
4	AV설비	주관부서 요청사항 반영(5층 AV설비)	16,753,983	17,643,040	889,057
직접공사비			48,424,268	66,100,811	17,676,543
간접공사비			25,430,569	27,899,189	2,468,620
공급가액			73,854,837	94,000,000	20,145,163
부가가치세			7,385,483	9,400,000	2,014,517
도 급 액			81,240,320	103,400,000	22,159,680

❍ 변경금액                                                      [단위: 원]

구 분	당 초	변 경	증, 감(-)	비고
도 급 비	81,240,320	103,400,000	22,159,680

3		보고자 의견

검토결과 조치의견

❍ 현장여건 및 주관부서 추가 요청사항을 반영한 서울시설공단(위탁감독)의 설계변경 기술검토의견 사항을 검토한 결과 검토보고 내용이 적정한 것으로 판단되어 변경계약을 시행하여 공정관리에 만전을 기하고자 함.

붙 임 : 서울시설공단 공문 1부.  끝.