문서번호	도로관리과-9956
결재일자	2019.6.24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		부속물관리팀장	도로관리과장
김수근		양기승	06/24 박문희
협 조
	주무관			오광원
	주무관			고동오

「도로부속물 유지관리이력 정보 구축」

실태평가용역 추진 공정 보고

2019. 6.

안전총괄실

(도로관리과)

「도로부속물 유지관리이력 정보 구축」

실태평가용역 추진 공정 보고

「도로부속물 유지관리이력 정보 구축 및 실태평가용역」의 내실 있는 추진을 위한 공정사항을 보고 드림

Ⅰ		용역 개요

□ 용 역 명 : 도로부속물 유지관리이력 정보구축 및 실태평가용역

□ 용역기간 : 2018. 11. 7 ~ 2019. 11. 6

□ 용 역 비 : 71,250,000원

***********************

***********************************************

*******************************************

Ⅱ		추진사항

○ ‘18. 8.31.         기술용역타당성심사

○ ‘18. 9. 4. / 11.  사업발주계획 등록 / 방침수립

○ ‘18. 9.11.~9.16. 사전규격공고(나라장터)

○ ‘18. 9.18. / 20.  계약의뢰(재무과) / 입찰공고

○ ‘18. 9.27.         제안서평가 계획수립방침

************************************

****************************************

******************************************

○ ‘18.11.27.      용역 착수보고회 개최(1회)

○ ‘19. 1.10.      용역사와 현단계 용역추진사항 검토

○ ‘19. 1.18.     노후인프라 선제적 관리체계 구축 부서간 검토회의(안전총괄과 주재)

○ ‘19. 2.20.     도로부속물 유지관리이력 정보구축 및 실태평가용역 추진사항 공정보고(2회)

- 빅데이터 분석시스템 구축 등 추진 사항

○ ‘19. 2.~ 5.    자료수집 및 DB자료작성 완료

Ⅲ		노후기반시설 빅데이터 시스템 개발 시연

□ 일  시 : 2019. 6.19.(수) 15:00~17:00

□ 장  소 : 신청사 2층 공용회의실 1

□ 참석자 : 13개 실태평가보고서 수립부서 팀장 및 담당자(주관 : 안전총괄과)

○ 도로시설과, 도로관리과, 교통정책과(서울교통공사), 물재생시설과, 하천관리과, 상수도 생상부/시설안전부, 건설혁신과(서울시설공단), 문화정책과(세종문화회관), 체육정책과, 보건의료정책과, 청소년정책과, 물재생계획과

□ 회의 개요

○ 빅데이터 분석시스템 개발 시연(교량안전과 자료 중심)

- 시설물별 빅데이터 분석시스템 개발 현황 보고

- Web에 구축된 시스템을 통한 실물시연

○ 실태평가용역 추진 현황

- 정보구축 및 실태평가 용역 협의사항

- 정보구축 수준 및 향후 일정

Ⅳ		정보구축 및 실태평가용역 중간보고(3회)

□ 일  시 : 2019. 6. 20.(목) 15:00~17:00

□ 장  소 : 도로관리과 6층 공용회의실

□ 참석자 : 6명

○ 도로관리과 부속물관리팀장, 용역 담당외 1명

○ 동일기술공사 한의석 이사외 2명

□ 회의내용(추진현황)

○ 자료수집 및 DB자료 작성 완료(‘19. 2. ~ 5.)

- 기관자료 수집 / 부속물별 자료분석

- DB표준양식 작성/ 부속물별 DB작성

○ 빅데이터시스템(안전총괄과)개발지원 및 DB연계 진행(‘19.2~’19.8.)

- 시스템사용자 인터페이스 개발지원

- 작성된 DB자료 시스템연계 및 작성내용 보완

○ 보수보강/ 성능개선 최적시기 분석 진행(‘19. 6.~’19.9.)

- 위험도 평가자료 분석

- 상태/성능 예측위한 관련자료 분석

- 보수시기 분석

○ 익년 및 중장기 관리계획 수립/ 보완 (‘19. 8.~’19.10.)

- 관리계획 초안 작성

- 성능개선위원회 운용

- 익년/중장기 관리계획 수립 및 예산분석

□ 기타 의견사항

○ ‘20년부터 부속물 도면전산화시스템 단계적/장기적 구축 필요

- 옹벽 등 도로부속물 도면, 현황자료 미흡 ⇒도면복원과 체계적 전산화 관리 필요

- 안전진단, 점검결과와 손상/유지보수 위치 추적관리 어려움

⇒ 통합적 유지관리체계 구축위해 단계적 투자 검토 필요

▷ 도면복원시 3D(BIM)복원 검토 등

Ⅴ		향후 계획

□  빅데이터 분석시스템 실태평가 용역 추진일정(13개 부서)

○ ‘19. 6. ~ 8.  빅데이터시스템 도로부속물 분야 DB 자료 작성 완료

○ ‘19. 8. ~10.  성능개선위원회 운용

단기/중장기 관리계획(안)작성

○ ‘19. 11.       실태평가 결과보고서 작성

□ 도로부속물 유지관리이력 정보구축 및 실태평가용역

○ 빅데이터 분석시스템 구축하도록 실태평가 용역 협력체계 유지. 끝.