투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	총무부장
(경유)
제목	동부간선도로확장 3공구 통신공사 계약변경 의뢰

1. 설비부-9413(2019.06.24.)호와 관련입니다.

2. 우리본부에서 추진중인 『동부간선도로 확장 3공구 통신공사』와 관련하여 아래와 같이 계약변경 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 동부간선도로 확장 3공구 통신공사

나. 계 약 자 : 제일정보통신(주) 대표 허영근

다. 공사기간 : 총차 2017.04.26.~ 2019.12.31.(2차 2018.11.30.~2019.06.30.)

라. 변경사항

변경내용	구 분	당 초	변 경	증 ․ 감
계약금액	2 차	300,000,000원	402,010,000원	증) 102,010,000원
	총 차	1,069,571,050원	1,237,580,000원	증) 168,008,950원

라. 변경사유 : 방음터널 적용 등 사업계획 변경에 따른 내역 반영

붙임 : 1. 검토보고서 1부.

2. 합의각서 1부.

3. 변경내역서(총차,2차) 1부. 끝.

	설비부장
주무관	손영일		시책사업과장	代박갑임		설비부장	06/24 임정규
협조자	재무예산과장	홍수열
시행	설비부-9467	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 (무교동) 프리미어플레이스B/D 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8650	/전송	02-3708-8659	/	zerone@seoul.go.kr	/	부분공개(5,6)