투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	총무과장
(경유)
제목	준공기한연장 변경계약 요청(광나루한강공원 자연(형)호안 복원사업 기본 및 실시설계용역)

1. 생태공원과-1334(2019.06.21.)호와 관련한 내용입니다.

2. 우리본부에서 추진 중인 ｢광나루한강공원 자연(형)호안 복원사업 기본 및 실시설계용역｣과 관련하여 아래와 같이 준공기한 연장코자 하오니 변경계약 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용역 개요

- 용 역 명 : 광나루한강공원 자연(형)호안 복원사업 기본 및 실시설계용역

- 용역기간 : 2018.11.28. ~ 2019.06.25

- 용 역 비 : 132,464천원

- 용 역 사 : ㈜서우티이씨(대표:강대신)

나. 준공기한 연장 : 90일 연장

구 분	용 역 기 간	용역비	비고
당 초	2018.11.28. ~ 2019.06.25.	변동없음
변 경	2018.11.28. ~ 2019.09.23.

다. 귀책소재 및 지체상금 부과 여부

- 귀책소재 : 한강사업본부

- 지체상금 : 미부과

붙임 : 검토보고서(방침서) 및 합의각서 각 1부.  끝.

	생태환경과장
주무관	이나영		생태환경과장	06/24 최병언
협조자
시행	생태환경과-1349	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로257(성수동1가 642-25) 한강사업본부 공원사업과	/
전화	02-3780-0872	/전송	02-3780-0745	/		/	대시민공개