문서번호	토목부-11146
결재일자	2019.6.24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		교량건설과장	토목부장
권해엽		장종환	06/24 김영수
협조
	주무관		황윤기

설계변경(전체 14회, 7차 1회)검토보고

-천호대로 확장공사 전면책임감리용역-

2019.06.

도시기반시설본부

(토목부)

설계변경(전체 14회, 7차 1회)검토보고

≪천호대로(광나루역) 확장공사 외 1개소 전면책임감리용역≫

‘천호대로(광나루역) 확장공사 외 1개소 전면책임감리용역’의 설계변경 요청에 대해 검토 보고드림.

- 수성 제2019-2129호(2019.06.20.) : 감리용역 설계변경 요청 (전체14회, 7차1회)

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 천호대로(광나루역) 확장공사 외 1개소 전면책임감리용역

○ 계약금액 : 5,894,400천원 (6차 : 1,397,230천원)

○ 계약기간 : ’10.11.01. ~ ’19.09.30. (7차 : ’19.02.23 ∼ ’19.09.30)

○ 계 약 자 : ㈜수성엔지니어링

□ 보고 내용(설계변경)

○ 계약금액 및 계약기간 조정

- 효율적인 업무수행을 위한 감리원 배치계획 변경

- 감리원 휴일대가 정산 반영

- 손해보험료 정산 반영

○ 계약금액 변경내역                                      (단위 : 천원)

구 분	계약기간			계약금액 (천원)			비고
	당초	변경	증·△감	당초	변경	증·△감
전체 (14회)	‘10.11.01 ∼ ‘19.09.30	‘10.11.01 ∼ ‘19.09.30	-	6,080,000	6,080,000	-
7차 (1회)	‘19.02.23 ∼ ‘19.09.30	‘19.02.23 ∼ ‘19.09.30	-	184,000	184,000	-

○ 감리원 투입 변경 현황

구 분			전 체	기 시행 (1∼6차)	7차 (금회)	비 고
현장별	등급	분야
책임감리원(총괄)			104.67 104.67	95.08	9.59 9.59	당초 변경
천호대로	감 리 사	토 목	5.50 5.50	5.50	- -
	감리사보	토 목	182.98 182.06	165.47	17.51 16.59
		건 축	12.81 13.81	6.72	6.09 7.09
		안 전	3.77 3.77	3.77	- -
		기 계	8.54 9.59	7.64	0.90 1.95
		상수도	16.13 16.13	16.13	- -
		전 기	24.44 23.59	20.58	3.86 3.01
		조 경	11.54 12.00	10.99	0.55 1.01

○ 감리단 검토의견

- 공공미술작품(상징조형물) 사업기간 중 감리원 배치계획 변경 및 배치기간 변경에 따른 감리용역의 설계변경 추진은 타당하고, 감리준공에 따라 휴일작업대가 반영 및 손해보험료 정산은 적정하다고 사료됨.

- 감리원 인력배치는 공정 추진에 따라 적정하게 계획하였으며, 감리용역비는 계약된 금액 내에서 용역기간 내 집행이 가능할 것으로 판단됨.

□ 조치의견

○ 상기와 같이 ‘천호대로(광나루역) 확장공사 외 1개소 전면책임감리 용역’에 대해 설계변경하여 감리업무에 차질이 없도록 조치코자 함.

붙  임 : 1) 감리 설계변경 요청 공문 1 부.

2) 변경설계서 및 합의각서 1 부.  끝.