문서번호	토목부-11343
결재일자	2019.6.25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도시고속도로과장	토목부장
박운용		명경출	06/25 김영수
협조
	주무관		서민석

금하지하차도 계측기간 조정 검토보고

- 강남순환도시고속도로(4공구) -

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 6.

도시기반시설본부

(토 목 부)

-강남순환도시고속도로(4공구)-

금하지하차도 계측기간 조정 검토보고

○ 금하지하차도 공사중 가시설 주변 지반거동 및 안정성 확인을 위한 계측관리를 시행하고 있으나, 가시설 철거 시점인 2019.7월까지 계측기간을 조정할 필요가 있어 검토보고 드림.

공사개요

❍  위    치 : 금천구 독산동～ 광명시 소하동 ~ 금천구 시흥동

❍  규    모 : 폭 4~8차로, 연장 2.48km

❍  도 급 비 : 1,999억 원

❍  공사기간 : □01. 12. 29. ～□19. 11.30.(민자구간 개통 □16. 7.3.)

❍ 시공사/건설사업관리단 : 롯데건설㈜/㈜서영엔지니어링

건설사업관리단 검토의견

❍ 금하지하차도 가시설 주변 지반거동 및 가시설의 안정성 확인을 위한 계측기 설치 및 계측관리를 시행하고 있으나, 계측관리 기간이 구조물 되메우기 완료 시점과 상이하여 계측관리 기간 조정이 필요한 실정임.

구 분	계측구간	계측관리 기간(월)	계측관리 기간
계측관리 및 보고서 작성	금하지하차도	착공후 30개월	2016.02~2018.07
	비개착구간	착공후 12개월	2017.09~2018.08

❍ 지하차도 계측관리는 구조물 되메우기가 완료되는 2019.7월까지 시행되어야 하며, 기 설계에 반영되어 있는 계측기간 이후에는 개착구간과 비개착구간 계측관리를 통합 관리하고, 부족한 계측기간은 반영함이 타당함.

❍ 수량 증·감 현황

공 종	당 초	변 경	증 ․감
개착구간 계측관리	30	41	11개월
비개착공법구간 계측관리	12	23

❍ 계측기 설치 단면도

❍ 공사비 증․감 비교표

(단위 : 천원)

비 목	당 초	변 경	증·감	비 고
총 공사비	534,500	581,700	47,200	기 계약단가 적용
순공사비	439,865	483,924	44,059
제 잡 비	94,634	97,775	3,140

검토의견

❍ 금하지하차도 가시설 구조물 안정성 확인을 위해 시행하는 계측관리 및 보고서작성 업무를 지하차도 되메우기 완료시점(`19.7)까지 추진코자하는 건설사업관리단의 실정보고는 적정하므로 승인하고, 추후 설계변경시 반영코자 함.

붙임 : 건설사업관리단 검토의견서 1부. 끝.