문서번호	급수운영과-11995
결재일자	2019.6.25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	주무관	급수운영과장
황중연	이일로	06/25 이성환

『2018-2차 남부수도사업소관내 포장도로 굴착복구공사』

설계변경 시행 보고(최종-1회)

2019. 6

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

설계변경 시행 보고(최종-1회)

2018-2차 남부수도사업소 관내 포장도로 굴착복구공사 계약금액 증가에 따른 본부(안전총괄과) 계약금액 조정 결과에 의거 아래와 같이 설계변경을 시행코자 보고 드림.

1. 관련근거

가. 남부수도 급수운영과-11458(2019.6.18.)【설계변경 심사 요청서】

나. 본부 안전총괄과-6440(2019.6.21)【계약금액 조정 결과 알림】

2. 설계변경 개요

가. 공 사 명 : 2018-2차 남부수도사업소 관내 포장도로 굴착복구공사

나. 공사기간 : 2019. 1. 10. ~ 2019. 6. 30.

다. 계약금액 : *************

라. 계약상대자 : *****************

마. 공사개요

구 분	합 계	ASP포장	CON’C포장	보도B/L포장
수 량	109.35a	108.85a	0.34a	0.16a

3. 설계변경 근거 및 사유

가. 설계변경 근거

- 지방자치단체를 당사자로하는 법률 시행령 제74조 제1항

【설계변경으로 인한 계약금액의 조정】

- 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준(예규 제21호) 제 13장

공사계약일반조건 제6절【공사설계의 변경】

나. 설계변경 사유

- 물량 증ㆍ감 발생에 따른 계약금액 증가로 설계변경 시행

4. 설계변경 현황

가. 변경공사개요 : (감) 13.65a

- 당 초 : 포장면적 123a → 변 경 : 109.35a

나. 설계변경금액 : ***************

- ************************************************

다. 물량(증) : 잔토소운반(굴삭기 0.18상차) 등 48개소 공종

공 종	구분	규 격	단위	당 초	변 경	증․감
잔토소운반(굴삭기0.18상차)	야간	4.5DT(현장->집하장6km)	㎡	2.0	32.0	증) 30
아스팔트포장(소폭띠모양)	주간	50㎡이하(t=12.5)	a	5.0	13.84	증) 8.84
PE free 휀스 설치 및 철거	주간		m	1,500	1,914	증) 414
등 물량 증감에 따른 48개 공종 계약단가 적용

라. 물량(감) : 아스팔트 포장절단(100~150mm) 등 133개소 공종

공 종	구분	규 격	단 위	당 초	변 경	증․감
아스팔트 포장절단	주간	100~150mm 적용	m	625	-	감) 625
아스팔트 중층공	주간	t=7.5cm,10㎡미만	a	1.0	-	감) 1.0
교통정리원	주간		hr	500	367	감) 133
등 물량 증감에 따른 133개 공종 계약단가 적용

마. 본부 검토 조정

- 신규공종 단가 수정 : 빗물받이 설치, 횡단 빗물받이 설치

: 인력비빔타설에는 지세할증 미적용, 엑셀수식 수정

- 소형안내공사안내판(야간) 물량 조정 : 안전시설 설치 및 철거 중복

: 당초 64개소 → 조정 7개소

바. 자체 검토 수정 조정

- 신규공종 단가 수정 : 빗물받이 설치, 횡단 빗물받이 설치

: 지세할증(노무비의 15%) 제외, 단가 계산 오류 수정

5. 설계변경 금액

구분	당초 계약금액	변경 계약금액	증 ․ 감	비 고
총 부기금액	************	*************	*************	*****

가. 변경내역서에 대한 물량 계산, 제잡비 요율 및 내역등을 검토한 바 적정함.

나. 검토근거 : 지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률 시행령 제74조

6. 조치의견

가. 위와 같이 물량 증․감 에 의한 계약금액 증가로 본부 안전총괄과에 계약금액 조정 검토가 완료됨에 따라 붙임과 같이 설계변경 및 변경계약 의뢰를(행정지원과) 시행코자 합니다.

붙임 : 1. 계약금액 조정 결과 알림 1부.

2. 계약금액 조정 결과서 1부.

3. 계약금액 조정결과 1부.

4. 변경 설계서(조정) 1부.  끝