문서번호	소방행정과-7083
결재일자	2019.6.25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
담당자	장비회계팀장	소방행정과장	소방서장
김종돈	김동욱	원병연	06/25 김두일
협 조

-마곡119안전센터 신설 개소에 따른- 행정사무기기 등 자산취득물품 구입 계획보고

2019. 6.

강 서 소 방 서

(소방행정과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등		□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호		□	의사결정 또는 내부검토 과정

마곡119안전센터 자산취득물품 구입 계획(안)

‘19. 10월 개소 예정인 마곡119안전센터 청사에 비치할 사무용

집기류  등 자산 취득물품 구매 계획을 보고 드림

Ⅰ		관련근거

❍ 市 소방행정과-1706(’19.1.21.)호『2019년도 세출예산 운영계획 알림』

❍ 소방행정과-604(’19.1.18.)호『2019년 마곡119안전센터 신설 사업비 예산 재배정 요청』

❍ 소방행정과-746(’19.1.22.)호『마곡119안전센터 예산집행 사용계획』

Ⅱ		건축개요

❍  위     치: 강서구 마곡동 749-8번지

❍  건축규모: 3층, 대지면적 1,063㎡ , 연면적 880.62㎡

※건폐율 49.76%, 용적률 82.84%, 높이 15.8m

❍  사업예산: 5,815백만원(부지 34억원, 건축 등 23억원)

건축 조감도		위치도

Ⅲ		예산배정 및 사용현황

❍  2018년 예산집행 현황

(단위:원)

구분	예산배정액(원)	지출내역(금액)	잔 액	비 고
계	3,556,108,000	3,551,626,800	4,481,200
시설비	110,925,000	설계비 등(107,095,800)	4,481,200
	3,445,183,000	토지매입비(3,444,531,000)

❍  2019년 사업비 예산

(단위 : 천원)

사업구분	예산과목	내 역	배정금액	비고
마곡119 안전센터 신설	계		2,235,795
	시설비 (401-01)	신설 공사비	2,123,720	건축공사 등
	시설부대비 (401-03)	준공행사 등	8,075	준공행사
	자산취득비 (405-01)	집기류 등 구매	73,000	집기류 등 구매
	사무관리비 (201-01)	사무용품 등 구입	31,000	사무용품 등 구매

Ⅳ		자산취득물품 구입 계획(안)

❍ 기    간: ’19. 7. 1. ~ 9. 20.

❍ 건    명: 업무용정수물품 등 자산취득물품 구입

❍ 배정예산: 금73,000,000원

❍ 구입품목: 행정사무기기 등 49종 357점(붙임참조)

❍ 소요금액: 금69,342,640원(조달수수료 포함)

구 분	품 목	금 액	발주시기	비고
조달발주 (제3자 단가계약)	가구류 등 31종 275점	금61,312,640원	7월 초	조달물품 선정
	가전제품	10,607,310
	운동기기	3,825,540
	가구류	44,340,150
	사무기기	2,539,640

구 분	품 목	금 액	발주시기	비고
전자상거래 (수의계약)	가전제품 등 18종 82점	금8,030,000원	7월 초	조달물품 없음
	가전제품	4,410,000
	운동기구	3,620,000

※집행잔액(금3,657,360원) 추가 물품구입 예정

❍ 구매절차

- 조달청 제3자단가계약물품 발주

소요량파악	⇒	구매계획 및 발주	⇒	조달발주 및 납품	⇒	검수	⇒	대가지급
5일		5일		30일 이내		14일		7일

- 전자상거래 구매(수의계약)

소요량파악	⇒	구매계획 및 발주	⇒	물품구매 (전자상거래)	⇒	검수	⇒	대가지급
5일		5일		10일 이내		14일		7일

❍ 구입방법: 조달청 종합쇼핑물 조달구매 및 전자상거래 구매

- 조달발주 품목: 중소기업 우선구매 품목 선정(가구류 등)

- 전자상거래 품목: 조달청 품목에 없는 상품 위주의 시장실거래

가격을 적용한 최저가 품목 선정

❍ 납품업체 선정: 조달품목 중 동일사양 저렴한 업체 선정

❍ 납품기한: 2019. 9. 15.(한)

Ⅴ		추 진 예 정

❍ 물품소요량 파악 및 계획 ----------------------‘19. 6. 28.

❍ 조달발주 및 전자상거래 발주 ----------------- ‘19. 7. 20.

❍ 물품검수 및 대금지급 -------------------------‘19. 9. 20.

붙임 1. 자산취득물품 구매 목록 1부.

2. 사무용 책상 및 가구류 구매 목록 1부.  끝.