문서번호	토목부-11281
결재일자	2019.6.25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도시고속도로과장	토목부장
박운용		명경출	06/25 김영수
협조
	주무관		서민석

U-Type구간 강관비계 및 작업발판 검토보고

- 강남순환도시고속도로(4공구) -

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 6.

도시기반시설본부

(토 목 부)

-강남순환도시고속도로(4공구) 금하지하차도-

U-Type 구간 강관비계 및 작업발판 검토보고

○ 금하지하차도 U-Type구간 강관비계 및 작업발판(비계다리) 수량이 설계에 누락되어 관련기준을 면밀히 검토하고 반영코자 보고드림.

공사개요

❍  위    치 : 금천구 독산동～ 광명시 소하동 ~ 금천구 시흥동

❍  규    모 : 폭 4~8차로, 연장 2.48km

❍  도 급 비 : 1,984억 원

❍  공사기간 : □01. 12. 29. ～□19. 11.30.(민자구간 개통 □16. 7.3.)

❍ 시공사/건설사업관리단 : 롯데건설㈜/㈜서영엔지니어링

건설사업관리단 검토의견

❍ 금하지하차도 U-TYPE부의 옹벽구조물 시공에 필요한 강관비계 및 비계다리(작업발판)는 설계에 미반영 됨.

❍ 국도건설공사 설계실무 요령(최초하단에서 2m높이에 설치)과 원설계자 의견을 검토한 결과 U-type구간 내부의 강관비계 및 작업발판은 반영함이 타당함.

※ 원설계자 의견(토목구조기술사 송봉섭)

- U-Type구간은 내부에도 강관비계 및 작업발판을 설치하는 것이 적정한 것으로 판단됨.

❍ U-TYPE부 비계 및 작업발판 설계현황

파란색 : 설계  / 빨간색 : 누락

❍ 수량 증·감 현황

공 종	단위	당 초	변 경	증 ․감
U-TYPE 비계 및 작업발판	㎡	3,941	5,500	1,559

❍ 공사비 증․감 비교표

(단위 : 천원)

비 목	당 초	변 경	증·감	비 고
총 공사비	592,700	640,000	47,300	기 계약단가 적용
순공사비	409,425	451,093	41,668
제 잡 비	183,275	188,907	5,632

검토의견

❍ 금하지하차도 U-TYPE부 시공을 위한 강관비계 및 작업발판이 일부(U-Type 내부 수량) 설계에 미 반영되어 관련 설계기준 및 원설계자의 의견을 검토하여 반영코자하는 건설사업관리단의 실정보고는 적정하므로 승인하고, 추후 설계변경시 반영코자 함.

붙임 : 건설사업관리단 검토의견서 1부. 끝.