문서번호	도시철도계획부-5473
결재일자	2019.6.25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		계획과장	도시철도계획부장
이경훈		김동철	06/25 김진팔
협조	신교통과장		성원배
	주무관		박노성

- 별내선(8호선연장) 건설사업 -

총사업비 조정사항 검토보고(8차-자율)

2019. 6.

도시기반시설본부

(도시철도계획부)

- 별내선(8호선연장) 건설사업 -

총사업비 조정사항 검토보고(8차)

별내선(8호선연장) 건설사업과 관련하여 물가변동 등 자율조정항목에 대해 총사업비 조정(8차)사항에 대해 검토의견임

□ 사 업 개 요

❍	위치	:	서울 강동구 암사동(8호선) ~ 서울시계 ~ 구리시 토평동 (서울시 강동구 암사동 ～ 별내역(경춘선))
❍	규모	:	3.72㎞, 정거장 1개소 (전구간 : 12.82㎞, 정거장 6개소)
❍	총사업비	:	1,288,209백만원 (서울시 476,115백만원, 경기도 812,094백만원)
❍	사업기간	:	2015 ~ 2022

❍ 계 약 현 황

공 구 명	서울시 시행		경기도 시행
	1공구(기타)	2공구(기타)	3공구(T/K)	4공구(T/K)	5공구(기타)	6공구(T/K)
공사기간	´17.8.23~ ´23.8.21	´17.9.30~ ´23.9.28	´16.6.8~ ´21.12.8	´16.7.18~ ´21.11.23	´16.10.4~ ´22.2.4	´16.6.7 ~´21.10.14
연장(km)	1.18	2.54	2.38	2.58	1.76	2.38
시공사	쌍용건설	두산건설	현대건설	태영건설	대우건설	고려개발
감리단	동해	도화	서영	동부	신성	도화

□ 총사업비 조정현황

(단위 : 백만원)
구 분		총사업비(A)			********		**************			비 고 (증감율)
		계	서울시	경기도	***	***	*	***	***
<총사업비>		1,288,209	476,115	812,094	******	******	*********	*******	*******	**** ******
1. 공사비		1,091,467	356,894	734,573	******	******	*********	*******	*******	**** ******
ㅇ 토목		795,873	242,590	553,283	******	******	*******	*******	*******	**** ******
ㅇ 궤도		27,492	8,360	19,132			******	*****	******
ㅇ 건축(기계포함)		94,951	12,554	82,397	***		******	******	******	**** ******
ㅇ 전기		72,316	27,138	45,178		***	******	******	******	**** ******
ㅇ 신호		32,775	17,903	14,872			******	******	******
ㅇ 통신		26,434	16,578	9,856			******	******	*****
ㅇ 차량기지		24,320	14,465	9,855			******	******	*****
ㅇ SE		5,558	5,558	-			*****	*****	*
ㅇ 시운전		11,748	11,748	-			******	******	*
2. 보상비		35,367	12,756	22,611			******	******	******
3. 시설부대경비		85,775	30,865	54,910	***	***	******	******	******	**** ******
	① 설계비	45,879	16,603	29,276			******	******	******
	② 감리비	38,072	13,672	24,400	***	***	******	******	******	**** ******
	③ 시설부대비	1,824	590	1,234	**	**	*****	***	*****	**** ******
4. 차량구입비		75,600	75,600	-	*	*	******	******	*

※ 증감율 : 서울시 / (전체)

□ 조정내역별 사유

구 분		조정액 (백만원)	조 정 사 유	비 고
계		******
공사비	ㅇ 토 목	******	******************************* ********************** ********************* ************************ ************************ ************************
	ㅇ 건 축	***	************************
감 리 비		***	************************* *************************
시설부대비		**	********************************

□ 향후 추진계획

❍ 국토교통부(대도시권광역교통위원회 광역시설운영과, 재정담당관) 및 경기도(철도건설과)와 총사업비 조정관련 협의 추진

붙임 : 1) 별내선 총사업비 조정 현황(1~7차) 1부.

2) 별내선 총사업비 조정 요구서(8차-자율) 1부.

3) 별내선 총사업비 조정 보충자료(8-자율) 1부.  끝.