문서번호	토목부-11247
결재일자	2019.6.25.
공개여부	부분공개(4)
방침번호

			시 민
주무관		광역도로과장	토목부장
김성권		박일연	06/25 김영수
협조
	주무관		이준범

공사 시행을 위한 회의결과 보고

(창덕궁앞 도성한복판 주요가로 개선사업)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019.6

도시기반시설본부

(토   목   부)

공사 시행을 위한 회의결과 보고

(창덕궁앞 도성한복판 주요가로 개선사업)

구청 요청에 의하여 중단된『창덕궁앞 도성한복판 주요가로 개선사업』에 대한 공사 시행을 위한 회의결과 보고임.

Ⅰ

사업개요

○  사 업 명 : 창덕궁앞 도성한복판 주요가로 개선사업

○  위    치 : 돈화문로 외 5개차로

○  규    모 : 가로개선(연장 2,400m, 폭1.5~22m)

○  기    간 : 2018.12.26. ~ 2019.12.31.(착공일로부터 371일)

○  사 업 비 : 13,558백만원(도급비 6,725백만원)

Ⅱ

추진경위

○'18.10.02 : 공사시행요청(역도과→토목부)

○'18.11.30 : 공사발주(토목+조경)

○'18.12.19 : 계약체결(낙찰자 선정)

○'19.02.21 : 건설사업관리용역 발주

○'19.04.01 : 건설폐기물처리용역 계약(낙찰자 선정)

○'19.04.04 : 건설사업관리용역 계약(낙찰자 선정)

○'19.05.10 : 공사이관 요청(구청장→역도과)

○'19.05.14 : 공사이관에 따른 관계기관 회의(역도과)

○'19.05.15 : 공사중단(업무지시)

○'19.05.28 : 자치구에서 시행하는 방안 회의(역도과)

○'19.06.18 : 개선(안)에 대한 자체검토 결과 알림(구청→도기본)

○'19.06.20 : 구청요구 내용 알림(구청→역도과)

○'19.06.24 : 공사이행을 위한 합동회의(역도과)

Ⅲ

회의결과

○ 장  소 : 시청(역사도심재생과)

○ 참석자   서울시 : 역사도심재생과 팀장,담당

본  부 : 광역도로과장, 업무담당

구  청 : 도로과장, 도로팀장외 1

○ 회의결과

1.구청 요구사항은 설계변경(역도과)으로 반영하고, 변경된 설계도서는 자치구와 재 협의 없이 확정

2. 보완설계는 시(역도과)에서 구청 요구사항을 반영한 재설계를 당초 용역사(동해)에서 시행

3. 보완 요청사항중 반영 가·부에 대한 내용을 확정하고 통보(구→시)

[보완 요청사항에 대한 구체적 처리방안]

ⅰ) 차도와 보도 단차는 구청과 시청에서 협의하여 처리후 설계반영

ⅱ) 자전거도로는 자전거정책과 협의하여 처리(구청요구 시청협조)

ⅲ) 판석 조정(15→30㎝)은 구청장 이해설득후 처리(20㎝등)

ⅳ) 도로시설물중 볼라드는 삭제하고 별도의 안전시설을 설계에 반영

ⅴ) 돈화문로 신호등 2개소 제거는 구청에서 규제심의로 결정

Ⅳ

행정사항

○ 구청 요구사항이 반영된 변경된 설계도서에 의한 공사시행

- 변경이 없는 구간에 대하여는 이른 시일내에 공사 시행이 필요함

○ 공사시행 중단 및 보완설계(자재구매 변경)에 따른 공사기간연기 불가피

○ 통합발주된 건설사업관리인『고덕교 확장 및 종각역 지하 공간재생사업』에 대한 감리투입

- 본부에서 시설공사가 다시 시행됨에 따라 당초 통합발주된 건설사업관리(고덕교확장 및 고덕보도교설치공사, 종각역 북측 지하공간 재생공사)분야 감리원 투입조치. 끝.