문서번호	소방항공대-1954
결재일자	2019.6.25.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

						시 민
담당자	2팀장		소방항공대장		119특수구조단장
장인수	이대진		박양수		06/25 이창식
협 조
	장비회계팀장					황의동
	담당자					박기현

소방항공대 환경개선공사 설계변경 실정보고

2019. 6.

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■
지속 가능성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	□	■

소방항공대 환경개선공사 설계변경 실정 보고(정정)

소방항공대 환경개선공사 진행중 설계누락부분 도장공사등 설계변경에 대하여 다음과 같이 검토 변경하고자 함.

Ⅰ		공사개요

사 업 명 : 소방항공대 청사 환경개선 공사

사업규모 : 대기실 증축(77.08㎡), 화장실개선, 사무실재배치 공사

계약기간 : 2019. 5.29 ~ 8.26

시 공 자 : 학선종합건설(주) 대표 김학규

*********************************

Ⅱ		실정보고 사항

관련근거

● 학선종합건설(주) 2019-06(2019.6.18.)호“소방항공대 청사환경개선공사 실정보고“

● 소방항공대-1915(2019.6.21.)호“소방항공대 환경개선공사 설계변경 실정보고”

● 지방계약법 시행령 제74조『설계변경으로 인한 계약금액의 조정』

변경요청사항

구분	공정	위치	내용	계약내역		설계변경내역		증감액 (+,-)
				물량	금액	물량	금액
건축공사 (보수)	도장공사	1층, 2층 (복도)	바탕만들기+ 수성페인트롤러칠 (콘크리트 벽체)	192 ㎡	1,259,136 원	384 ㎡	2,518,272 원	+ 1,259,136 원
		2층 (대장실)	바탕만들기+ 수성페인트롤러칠 (석고보드면)	39 ㎡	594,048 원	20 ㎡	304,640 원	- 289,408 원
		1층, 2층 (복도)	바탕만들기+ 수성페인트롤러칠 (걸레받이)	7 ㎡	105,441 원	10 ㎡	150,630 원	+ 45,189 원
	수장공사	1층 (샤워실,화장실, 탈의실)	열경화성수지천장재/천정틀, 몰딩포함	31 ㎡	1,402,285 원	45 ㎡	2,035,575 원	+ 633,290 원
		1층 (탈의실)	일반텍스붙임	7 ㎡	92,890 원	0㎡	0 원	92,890 원
		1층 (대장실)	DRY WALL(C-65)	20 ㎡	1,433,080 원	10 ㎡	716,540 원	- 716,540 원
	철거공사	1층 (화장실,샤워실)	벽돌 및 블록벽 철거	5 ㎥	335,350 원	22 ㎥	1,475,540 원	+ 1,140,190 원
		1층 (화장실,샤워실)	모르타르 철거	11 ㎡	144,023 원	60 ㎡	785,580 원	+ 641,557 원
건축공사 (증축)	도장공사	2층 (힐링실,대기실)	바탕만들기+ 수성페인트롤러칠 (콘크리트 벽체)	36 ㎡	236,088 원	260 ㎡	1,705,080 원	+ 1,468,992 원
		2층 (힐링실,대기실)	바탕만들기+ 수성페인트롤러칠 (석고보드면)	64 ㎡	1,143,103 원	0 ㎡	0 원	1,143,103 원
	수장공사	2층 (힐링실,대기실)	석고판못붙임 (바탕+치장용,천정)	64 ㎡	1,434,048 원	0 ㎡	0 원	1,434,048 원
		2층 (힐링실,대기실)	샌드위치판넬설치-벽	100 ㎡	6,245,300 원	130 ㎡	8,118,890 원	+ 1,873,590 원
기계설비공사	장비설치공사	1층 (샤워실)	EWT-1.전기온수기(15LIT)	1 EA	217,479 원	2 EA	434,958 원	+ 217,479 원
	위생기구설치공사	1층 (화장실)	소변기	4 SET	810,764 원	3 SET	608,073 원	- 202,691 원
직접 재료비			32,518,608 원			33,943,720 원		+ 1,425,112 원
직접 노무비			47,248,108 원			49,221,218 원		+ 1,973,110 원
간접 노무비			3,732,600 원			3,888,476 원		+ 155,876원
경비			11,920,497 원			12,302,643 원		+382,146 원
계			95,419,813 원			99,356,057 원		+ 3,936,244원
일반관리비			4,293,891 원			4,293,891 원		0 원
이윤			6,728,115 원			6,728,115 원		0 원
공급가액			106,441,819 원			110,378,063 원		+ 3,936,244원
부가가치세			10,644,181 원			11,037,806 원		+ 393,625 원
총 공사비			117,086,000 원			121,415,000 원		+ 4,329,000 원 (천원미만절사)

Ⅲ		예산현황

소방항공대 환경개선공사 예산현황

(단위:원)

예산과목	예산편성액	계약금액 (건축,전기,소방,폐기물)	집행잔액 (낙찰차액 포함)	비고
시설비	215,000,000	194,127,490	20,872,510

설계변경 소요예산(가격산정기준 계약내역 단가적용금액)

(단위:원)

공 종	변 경 사 유	변 경 전	변 경 후	증 감 액
건축공사	•도장공사,수장공사등	117,086,000	121,415,000	4,329,000

- 공사 원가계산서 : 붙임

Ⅳ		검토 및 처리의견

설계 변경 내역 검토

● 증축 및 보수공사중 도장공사, 수장공사등에 대한 공종별 누락 및 변경부분은 공사 완공을 위한 설계내역 변경

검토의견 : 승인

● 상기와 같이 설계변경에 대하여 설계자 및 시공사 등 의견과 항공대 직원 사용자들의 의견 반영 향후 관리유지 등 편리성을 감안 실정보고    사항에 대하여 검토한 바, 설계변경 시공하는 것이 적정 하다고 판단되어    승인처리 하고자 함.

● 설계변경 소요되는 예산은 낙찰차액으로 집행

붙임  설계변경 관련 내역서 1부. 끝.