문서번호	시설보수과-5086
결재일자	2019.6.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★전문관		시설보수과장
김영원		전결 06/25 오재섭
협조

설계변경(정산)보고

(월계2교 내진보강공사)

2019. 6

북부도로사업소

시설보수과

설계변경(정산)보고

(월계2교 내진보강공사)

우리사업소에서 시행한『월계2교 내진보강공사』가 완료됨에 따라 기 보고한

낙찰차액활용 보고서에 의거 설계변경(정산) 시행코자 함.

□ 관련근거 : 시설보수과 – 4489(2019. 6. 3)호 낙찰차액활용 계획 보고

□ 공사현황

◯ 공 사 명 : 월계2교 내진보강공사

◯ 공사기간 : 2019. 03. 15 ~ 2019. 9. 30

◯ 도 급 비 : 64,000,000 원

◯ 공사개요 : - 전단키설치 4개소

- 단면보수 35㎡

◯ 도 급 자 : ㈜건맥이엔씨   대표 전 태 수

□ 보고내용

◯ 설계변경 시행근거

(단위 : 원)

연번	구 분(제목)	주요 변경내용	도급비 증ㆍ감	관 련 근 거
1. 교대상면 단면보수 신규발생 30㎡			증) 5,437,140(순공사비)
①	실정보고서(1회)	교대 열화면 단면보수 30㎡	증)5,437.140	시설보수과-3877 (2019.05.14)
2. 제경비 실 사용 정산에 의한 변경			감)845,701
①	4대 보험료 정산 등	건강,연금,노인장기,퇴직공제,환경보 전비,하도급발급수수료,건설기계대여금 정산	감)845,701	실적용

◯ 물량 변경 내용

(단위 : 원)

공 종	규격	단위	수 량		금 액		공사비 증․감 (순공사비)
단면보수	T = 30mm	㎡	당초	0	당초	0	증)5,437,140
			변경	30	변경	5,437,140

◯ 금액 변경 내용

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증 ․ 감
총공사비	56,495.600	62,380,000	증) 5,884,400
도 급 비	55,745,600	62,380,000	증) 6,634,400
관급자재비
이전비	750,000	0	감)750,000

※부가세포함 금액

□ 조치의견

상기 보고내용과 같이 기 실정보고한 사항에 대한 설계변경으로 보고 내용대로 설계변경(정산)시행 코자 함.

붙임 : 관련서류 일체 1부.끝.