문서번호	정수시설과-1559
결재일자	2019.6.25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	구의아리수정수센터소장
김현철		조귀현	06/25 이달영
협조

【2019년 자동제어설비 용역】

설계변경 심의 결과 보고

2019. 6.

구의아리수정수센터

(정수시설과)

【2019년 자동제어설비 용역】

설계변경 심의 결과 보고

우리 센터『2019년 자동제어설비 유지관리용역』시행 중 발생한 물량 증·감 사항에 대하여 설계변경 심의를 실시하고, 그 결과를 아래와 같이 보고 드림.

□ 공사개요

❍ 용 역 명: 2019년 자동제어설비 유지관리 용역(장기1차)

❍ 용역기간: 2019.04.23. ~ 12.31(총완수일자 2020.03.31.)

❍ 계약업체: ㈜누리제어시스템   대표 박상진

❍ 계약금액: 금47,000,000월(총부기금액  금53,700,000원)

❍ 용역내용

- HMI장치, PLC, 허브, 응용프로그램 및 데이터베이 점검 등

□ 설계변경 심의 내용

❍ 물량 증․감 사항 발생

공 종		규 격	단위	변경전	변경후	증감
1차	HMI 장치 점검	9식	회	4	3	감1
	FEP(PLC)장치 점검	PLC:70, 터치패널:71	회	4	3	감
	허브점검	허브 : 61, ETOS 7	회	1	3	증2
	응용프로그램 및 데이터베이스 점검	방화벽 1대 및 기타	회	-	1	증1
2차	HMI 장치 점검	9식	회	-	1	증1
	FEP(PLC)장치 점검	PLC:70, 터치패널:71	회	-	1	증1
	허브점검	허브 : 61, ETOS 7	회	3	1	감2
	응용프로그램 및 데이터베이스 점검	방화벽 1대 및 기타	회	1	-	감1

❍ 설계변경에 따른 변경계약 금액

계약금액	구 분	1차	2차	총차
	변경전	**********	**********	**********
	변경후	**********	**********	**********
	증․감액	**********	**********	*
계약기간	당 초	2019.04.23. ～ 12.31(총차 2020.03.31.)
	변경후	변경없음

□ 심의결과

❍ 설계변경의 타당성: 타당함

❍ 계약 변동(증․감) 물량 적정 적용 여부: 적정

❍ 제잡비 산정 및 적용 적정성 여부: 적정

❍ 각종 제반규정 준수 여부: 준수

□ 조치의견

❍ 심의 결과에 따라 설계변경 시행코자 합니다.

따로붙임: 1. 설계변경 심의 의견서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.   끝.