	서울특별시도시기반시설본부
수신자	총무부장
(경유)
제 목	설계변경(전체32회,15차1회) 계약의뢰

우리 부서에서 시행중인 『강남순환도시고속도로(4공구) 건설공사』와 관련하여 아래와 같이 설계변경 계약 및 준공기한 연기를 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

1. 공 사 명 : 강남순환도시고속도로(4공구) 건설공사

2. 공사개요 : 도로개설 폭4~8차로, 연장 2.48km

3. 공사기간 : 2001.12.29. ~ 2019.11.30.(15차 2019.01.09. ~ 11.30.)

4. 도 급 비 : 198,370백만원(15차 22,678백만원)

5. 도 급 사 : 롯데건설

6. 설계변경 내역

(단위 : 천원)

구 분		당 초	변 경	비고
공사기간	전체(32회)	***********************	**********************	*****
	금회(15차1회)	***********************	***********************	*****
도급액	전체(32회)	***********	***********	***********
	금회(15차1회)	**********	**********	*

- 설계변경 사유

․ 물가변동 및 실정보고 반영

․ 지하차도 착공 지연 및 공법변경에 따른 준공기한 반영

7. 예산과목

- 도로계획과, 도로건설, 도시고속도로망 확충(도시개발특별회계), 강남순환도시고속도로건설, 시설비 및 부대비, 시설비

붙  임 : 1. 설계변경 보고서 1부.

2. 준공기한 연기 검토보고서 1부.

3. 준공기한 연기 의뢰서 1부.

4. 설계변경 내역서(전체32회,15차1회) 1부.

5. 합의각서 1부.  끝.

	토목부장
★주무관	서민석		도시고속도로과장	명경출		토목부장	06/25 김영수
협조자	주무관	박운용
시행	토목부-11245	(		)	접수		(		)
우	04520	서울시 중구 청계천로 8 프리미엄 플라이스 빌딩 12층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-8667	/전송	02-3708-2599	/	khaisky@seoul.go.kr	/	부분공개(5 6)