문서번호	급수운영과-12111
결재일자	2019.6.26.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

						시 민
★주무관	주무관		급수운영과장
이상현	유명수		06/26 代박장진
협 조

「2018년 중구 관내 상수도공사」

설계변경 심사 결과보고

2019. 6

중부수도사업소

(급수운영과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□

『2018년 중구 관내 상수도 급수공사』

설계변경(최종) 심사 결과보고

우리사업소에서 시행중인 2018년 중구 관내 상수도공사(장기계속공사) 관련 본부에 요청한 설계변경 심사건에 대하여 그 결과를 보고 드림

1. 심사결과

가. 공 사 명 : 2018년 중구 관내 상수도 급수공사(장기계속)

나. 공사개요 : D=13~300mm, L=1,354m

다. 계약기간 :  2018.05.08 ~ 2019.06.30

라. 계약상대자 : ***************

마. 도 급 비

- 심사요청액 : ************ (증 41,630,000원)

- 심사결과액 : ************ (증 38,497,000원)

- 심사 증·감 :  감) **********

2. 조정내역

가. 본부심사 : 토공 및 사급자재 수량 일치

- 환토소운반 및 환토상차 수량 조정

- 터파기, 되메우기, 다짐 등 토공 수량 일치

- 부단수할정자관 시공수량, 사급자재 수량 일치

- 관급자재운반 수량 조정

나. 제비율 조정

- 본부 설계변경 심사 후 계약금액조정검증시스템을 통하여 제비율 검증한 결과, 노인장기요양보험료, 일반관리비, 이윤에서 제비율 과다산출액 발생

- 과다산출된 제비율 금액(노인장기요양보험료, 일반관리비, 이윤) 아래와 같이 조정 시행(제비율 재검증 결과 과다산출액 없음)

구 분	당 초(원)	변 경(원)	증,감(원)
노인장기요량보험료	*******	*******	********
일반관리비	**********	**********	*****
이 윤	**********	**********	********
도 급 비	***********	***********	********

3. 조치의견

- 상기와 같이 본부 설계변경 심사에 따른 물량 조정내역에 과다산출된 제비율 금액을 조정하여 설계변경 시행하고자 합니다.

붙임 : 1. 본부 설계변경심사결과 1부.

2. 제비율 조정 내역서 1부.

3. 제비율 검증결과(최종) 2부.  끝.