문서번호	시설과-2641
결재일자	2019.6.26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	시설과장	경영지원부장		서울역사박물관장
이태준	박관현	임원빈		06/26 송인호
협 조
	총무과장		김춘섭

- 상설전시실 1존 진열장 파손사고 관련-

전시실 CCTV설치 사업비 및 발주방법 변경보고

2019.  6.

서울역사박물관(시설과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

- 상설전시실 CCTV설치.운영실태조사 및 보완대책 관련-

전시실 CCTV설치 사업비 및 발주방법 변경보고

상설전시실 진열장 파손에 따른 CCTV 추가설치와 관련하여

저장여유 공간 확보를 위해 사업내용 일부 변경과 영상저장 서버 등

일부 품목의 조달구매 불가로 인하여 자체 계약으로 변경하고자 함

Ⅰ		추진근거

총무과-4612호(‘19.5.3)호: 진열장 파손사고 관련 조사결과 보고

- CCTV 전수조사 및 추가설치, 센서감지 보완 등 대책 마련 필요

시설과-2172호(‘19.5.28)호: CCTV설치.운영실태 조사 및 보완대책

- CCTV 추가설치(21대), 전시물 보안시스템 초음파센서 57대 설치 등

Ⅱ		CCTV 설치현황

CCTV 현황

카메라위치		합계	카메라 종류
			고정형	회전형
합 계		182	118	64
1층	소 계	46	30	16
	기증유물전시실(1실~5실)	8	3	5
	기획전시실	9	3	6
	정문앞,로비,학습실앞,강당앞,방재실앞 등	29	24	5
2층	중앙복도,학습실,사무실앞 등	15	12	3
3층	소 계	48	28	20
	상설전시실(1존)	10	4	6
	상설전시실(2~4존)	17	9	8
	도시모형영상관,오버브리지,EPS실 등	21	15	6
옥상	전방좌.우측, 후방 좌.우측	4		4
지하 1층	수장고 입구.내부,복도,EPS실 등	22	16	6
외부	광장,시전유구,박물관 주변 외곽	30	21	9
경희궁	숭정문,태령전,자정전,숭정전,흥화문 주변 등	17	11	6

서버 현황 : 전산실 6대(저장서버3대 등), 방재실 3대(뷰어서버)

작 성 자	경영지원부 부장 임원빈 ☎ 0105 과장 박관현 ☎ 0130 담당 이태준 ☎ 0132

Ⅲ		당초 계획

시설과-2172호(‘19.5.28)호: CCTV설치.운영실태 조사 및 보완대책

사업예산 : 총 112,525천원

공 종	소요예산(천원)	예 산 과 목
계	112,525
CCTV 추가설치(21대)	60,818	역사와문화의복합공간창조, 관리지원기반구축, 박물관유지.운영, 공공운영비(100-201-02)
전시물 보안시스템 초음파 센서 구매 및 프로그램개발	19,207	역사와문화의복합공간창조, 관리지원기반구축, 박물관유지.운영, 공공운영비(100-201-02)
전시물 보안시스템 정보통신공사(배관,배선)	32,500	역사와문화의복합공간창조, 관리지원기반구축, 박물관유지.운영, 공공운영비(100-201-02)

Ⅳ		변경계획

변경대상 : CCTV 추가설치(21대)

변경내용 : CCTV 사업비 변경 (60,818,000원  ⇨ 67,878,000원)

발주방법 변경(조달구매 ⇨ 조달구매+자체계약)

품 명	사업비(단위:원)		발주방법
	당 초	변 경	당초	변경(조달구매 + 자체계약)
계	60,818,000	67,878,920 (증)7,060,920	조달구매 (제3자단가)	조달구매 -대상 : 카메라 21대 및 부속설비 케이블 배관.배선 및 조정.시험 - 금액 : 35,674,320원 (조달수수료포함) - 업체 : ㈜금성보안 2. 자체계약 - 대상 : 영상저장 SERVER, FC HBA 카드 1개,SWITCH HUB 2개 HDD 6TB 4개 - 금액 : 32,204,600원 - 업체 : ㈜금성보안 - 사유 : 기 보급된 장비와의 호환성을 위함 (조달구매 불가품목) ⇨ 일상감사,계약심사 필요
영상감시장치 (통합관제서버)	12,353,900	0
영상저장 SERVER, FC HBA 카드 1개 SWITCH HUB 2개 HDD 6TB 4개	0	32,204,600
카메라 21대 및 부속설비 , 케이블 배관.배선 및 조정.시험	48,137,980	35,482,720
조달수수료	326,120	191,600

※영상감시장치  : 통합관제서버기능으로 CCTV 동영상을 실시간  모니터링으로

저장기능 없음

영상저장서버  : 카메라를 1개월간 저장할수 있는 1대당 1테라비트 서버 확보필요

변경사유

1. 감시시스템 추가는 불필요하므로 삭제하고, 금회 카메라 21대 추가로

인하여 영상저장서버 용량이 부족하고 향후 CCTV추가(본관수장고       재배치,본관 승강기 증축, 기증유물전시실 2~5존 개편 등)를 대비하여      영상저장서버 1대 64채널(24테라비트)증설이 필요한 실정임

구 분	기 설치 현황	당초 사업계획	금회 사업계획
영상저장서버	∙ 채널수 - 설치 :192CH - 사용 :182CH - 여유 : 10CH ∙ 서버용량 - 설치:192테라비트 - 사용:182테라비트 - 여유: 10테라비트	∙ 미 반영	∙ 영상저장서버 64채널(24테라비트) 증설 필요
영상감시장치	∙ 통합관리서버 : 1대 (VRPS-VMS 64S)	∙ 감시시스템 1대 (VRPS-1) 추가	∙감시시스템 추가 불필요하므로 삭제
카메라 대수	182대	∙ CCTV 21대 추가	∙ CCTV 21대 추가

2. 변경 구성도

변경전                       변경후

3. 영상저장서버 조달구매 불가

- 영상저장서버는 조달청 옵션 품목(현재는 재계약 추진으로 미 등록)으로        향후 조달품목에 등록되더라도 조달구매 불가

4. 카메라 영상은 네트워크를 통해 기 설치된 통합관리서버.저장분배서버와

고유의 프로토콜(통신규약)로 이뤄지기 때문에 본 사업의 목적을 달성     하기 위해 영상저장서버는 ‘18년에 구축된 ㈜금성보안 제품으로 구매     설치 필요

○ 관련근거

- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조
1항 4호 타목: 이미 조달된 물품 등의 부품교환 또는 설비확충 등을 위하여 조달하는 경우로서 해당 물품 등을 제조·공급한 자 외의 자로부터 제조·공급을 받게 되면 호환이 되지 아니하는 경우

- 중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 시행령 제7조 (중소기업자간 경쟁입찰의 예외 등) 1항 4호: 특정한 기술·용역이 필요한 경우 등 공공기관의 특별한 사정으로 인하여 중소기업자간 경쟁입찰 외의 방법으로 구매하려는 경우

Ⅴ		향후 일정

❍‘19. 6.27  : 일상감사. 계약심사의뢰(영상저장 SERVER 등)

❍‘19.  6.27  : 조달구매의뢰(카메라 21대 및 부속설비 등)

❍‘19.  7월  : 일상감사 및 계약심사후 자체구매(영상저장 SERVER               외 3 품목)

❍‘19.  9월   : 사업완료

붙임 : 견적서 및 산출기초조사서 . 끝.