“소비자는 소득공제 40％, 판매자는 수수료 0％” 정답은 제로페이!
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	하천점용 허가기간 연장요청(우이3교 성능개선 공사)

1.도봉구 가로관리과-7700(2018.7.6.)호 및 강북구 건설관리과-9657호(2018.7.6.)와 관련입니다.

2. 우리시에서 시행중인 『우이3교 성능개선공사』와 관련하여 공사기간 연장으로 하천점용 허가기간 연장(변경) 신청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 하천점용허가 연장(변경) 현황

허가번호	점용위치	점용면적 (㎡)	점용기간		비 고
			당 초	연장(변경)
제107216776호	도봉구 창동 737-7 번지 외 1(737-8)	2,664㎡	’18년7월20일부터 ’19년8월30일까지 (13개월10일간)	’18년7월20일부터 ’19년12월30일까지 (17개월10일간)	도봉구
제102223375호	강북구 번동 655-7번지	2,423㎡			강북구
제102223376호	강북구 번동 655-6번지	40㎡

붙 임 : 하천점용 허가기간 연장신청서 1부. 끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	도봉구청장(가로관리과장),강북구청장(건설관리과장)
★주무관	김태형		강북일반교량팀장	손창익		교량안전과장	06/26 김종호
협조자
시행	교량안전과-11263	(		)	접수		(		)
우		서울특별시 중구 덕수궁길 15(서소문동) 1동 2층	/
전화	02-2133-1968	/전송	02-2133-1429	/		/	부분공개(5)