＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	중부수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	설계변경 시행(2018년 중구,용산구 상수도공사 및 시설물공사 건설폐기물 처리 용역)

우리사업소에서 시행중인 「2018년 중구,용산구 상수도공사 및  시설물공사 건설폐기물 처리용역(장기계속단가계약)」 건에 대하여 아래와 같이 설계변경을 시행코자 합니다.

1. 계약건명 : 2018년 중구,용산구 상수도공사 및 시설물공사 건설폐기물 처리용역

(장기계속단가계약)

2. 계약업체 : ****************

3. 계약기간 : 2018.06.04. ~ 2019.06.30.

4. 설계변경 내용 : 시공물량 증감 발생

5. 설계변경 내역

***	*******	*******	*************	비 고
******	**********	**********	**********	2018년 단위공사 폐기물 착공 지연으로 인해 상기 용역으로 반출하여 금액 증가
*******	*	*	*
*******	**********	**********	**********

6. 계약금액 변경사유 : 시공물량 증․감

7. 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 배․급수공사비, 신설공사비

자본적지출,유형자산취득,구축물,시설비및부대비(시설비및부대비)

- 노후상수도관정비(배급수관),노후밸브

자본적지출,유형자산취득,구축물,시설비및부대비(시설비)-송배수관

자본적지출,유형자산취득,구축물,시설비및부대비(시설비)-유수장애

자본적지출,유형자산취득,구축물,시설비및부대비(시설비)-간선배관

자본적지출,유형자산취득,구축물,시설비및부대비(시설비)-배급수관

자본적지출,유형자산취득,구축물,시설비및부대비(시설비)-소블록 배급수관망개선

붙임 : 설계변경 내역서 및 관련 서류 각 1부.  끝.

주무관	조민성		급수설비팀장	박장진		급수운영과장	代박장진		중부수도사업소장	06/26 황일람
협조자
시행	급수운영과-12184	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송	3146-2189	/	wat0619@seoul.go.kr	/	부분공개(7)