＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	상수도사업본부
수신	내부결재
(경유)
제목	물품 제작 구매 변경 계약 체결(양재가압장 천장크레인 제작구매설치)

1. 기전설비과-5939호(2019.6.18.)와 관련입니다.

2.‘양재가압장 천장크레인 제작구매설치’건의 계약상대자와 아래와 같이 변경 계약을 체결하고자 합니다.

가. 건명 : 양재가압장 천장크레인 제작구매설치

나. 계약상대자 : *****

다. 계 약 기 간 : 2018.7.5.~ 2019.6.30.

라. 계 약 금 액 : 금35,426,030원(금삼천오백사십이만육천삼십원)

마. 변 경 내 용 : 납품기한 변경

구분	당초	변경	비고
납품기한	2019.6.30	2019.9.30	92일 연장

바. 변 경 사 유

- 선행공정 지연에 따른 물품 납품기한 조정

붙임: 물품 변경계약서(초안) 및 관련서류 각 1부.  끝.

주무관	박상진		재무회계과장	김분숙		요금관리부장	06/26 조두업
협조자
시행	재무회계과-8884	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51 3층 (합동)	/
전화	02-3146-1231	/전송	02-3146-1209	/	chadol2000@seoul.go.kr	/	부분공개(7)