투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	총무부장
(경유)
제목	계약금액조정(총차5회, 5차3회, 6차1회) 및 준공기한 연장 의뢰(신월빗물저류 배수시설 등 방재시설 확충공사)

1. 우리본부에서 시행중인「신월빗물저류배수시설 등 방재시설확충공사」에 대하여 아래와     같이 계약금액조정(총차5회,5차3회, 6차1회) 및 총차분에 대한 준공기한 연장을 의뢰      하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 신월빗물저류배수시설 등 방재시설 확충공사

나. 계 약 자 : 현대건설(주) 외 2개사

다. 계약금액 내역

(단위 : 원)

구 분	당초	변경	증․감	비 고
총차분(5회변경)	106,559,000,000	108,859,000,000	증2,300,000,000
5차분(3회변경)	26,143,000,000	26,143,000,000	-
6차분(1회변경)	8,305,000,000	7,371,000,000	감934,000,000

〇 변경사유 : 발주처 요구에 의한 잔류수 배재펌프 용량 증대, 카-리프트 설치,                      창의공원 조성 등 반영을 위해 계약금액조정 필요

라. 준공기한 연기

〇 준공기한 변경내역

구 분	당초	변경	증․감	비 고
총차분	`13.05.27.~`19.06.30	`13.05.27.~`19.12.15	증) 168일

- 변경사유 : 양천구 요구사항인 유지관리 차량 투입을 위한 카-리프트 설치 및                       창의공원(반곡, 곰달래) 조성에 따른 추가 공기 소요

마. 예산과목 : 하천관리과, 치수및하천관리, 수방대책사업, 신월빗물저류배수시설                      설치, 시설비및부대비, 시설비.

붙임  1. 방침서 1부.

2. 설계도서 1부.  끝.

	방재시설부장
주무관	이병환		치수시설과장	조성만		방재시설부장	06/26 이임섭
협조자	재무예산과장	홍수열
시행	방재시설부-9303	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(프리미어플레이스빌딩 14층) 도시기반시설본부 방재시설부	/
전화	02-3708-8773	/전송	02-3708-8756	/	bhl923@seoul.go.kr	/	대시민공개