문서번호	급수운영과-12159
결재일자	2019.6.26.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		급수설비팀장	급수운영과장
조민성		박장진	06/26 代박장진
협 조
	주무관			유명수
	주무관			김헌중
	주무관			김종수
	주무관			이보민
	주무관			신정우
	주무관			김지훈

「2018년 중구,용산구  상수도공사 및 시설물공사 건설폐기물 처리용역」

설계변경 심의 보고서

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 06

설계변경 심의 결과 보고

□ 공사 개요

○ 용 역 명 : 2018년 중구,용산구 상수도공사 및 시설물공사 건설폐기물

처리용역(장기계속단가계약)

○ 용역개요

- 당초 : 폐기물운반  660㎥, 폐기물처리 : 1,552ton                          - 변경 : 폐기물운반  785㎥, 폐기물처리 : 1,830ton

○ 계약금액

******************

*******************

○ 용역기간 : 2018.06.04 ~ 2019.06.30

○ 도 급 자 : ***************

□ 설계변경 세부내용 및 사유

○ 변경사유 : 2018년 단위공사 폐기물 착공 지연으로 인해 상기 용역으로 반출하여 물량 증가

공사명	구 분	폐기물 운반(㎥)		비고(증․감)	폐기물 처리(ton)		비고(증․감)
		당 초	변 경		당 초	변 경
이촌동 송배수관	폐아스팔트	-	108.88	증 108.88	-	248.82	증 248.82
한남동 배급수관	폐아스팔트	-	42.14	증 42.14	-	99.04	증 99.04
	폐콘크리트	-	53.63	증 53.63	-	123.34	증 123.34
계				증 204.65			증 471.2

○주요공종 물량변경사항

구 분	폐기물 운반(㎥)		비고(증․감)	폐기물 처리(ton)		비고(증․감)
	당 초	변 경		당 초	변 경
폐아스팔트	360	522	증 162	846	1,226	증 380
폐콘크리트	300	263	감 37	690	604	감 86
폐 토 석	10	-	감 10	16	-	감 16
계	670	785	증 115	1,830	1,212	감 618

○ 용역비 변경내역

구 분	당 초	변 경	증 감 액
용 역 비	43,651,000원	51,357,000원	증 7,706,000

설계변경 사전심의 의결서

○ 공 사 명 : 2018년 중구,용산구 상수도공사 및 시설물공사 건설폐기물

처리용역(장기계속단가계약)

○ 상기 공사시행 중 시공물량 증․감 및 신규공종 발생에따라 따로붙임과  같이 설계변경코자 하오니 적정성 여부를 심의하여 의견을 제시하고 의결함.

□ 심의위원회 의결내용 : 본안통과, 보류, 부결, 기타

구 분	성 명	의 견	확 인	비 고
위 원 장	급수운영과장 유용일	적정함	代 박장진
위 원	급수운영과 김헌중	적정함	김헌중
위 원	급수운영과 유명수	적정함	유명수
위 원	시설관리과 김종수	적정함	김종수
위 원	시설관리과 이보민	적정함	이보민

※ 급수설비팀장 진행자로 급수운영과 김헌중 위원으로 변경.

2019. 06. 26.

(간  사)  진행자 : 급 수 설 비 팀 장   성명 : 박 장 진  (인)박장진

(입회자) 업무담당자 : 급 수 운 영 과   성명 : 조 민 성 (인)조민성

따로붙임 : 변경 설계 관련도서 각 1부. 끝.