문서번호	시설관리과-13561
결재일자	2019.6.27.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설관리과장
구본천		김효수	06/27 김기상
협조

설계변경 심의결과 및 변경 시행 보고

(당산중학교~영등포고가차도간 송배수관정비공사)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 6.

시설관리과

명에 의거「당산중학교~영등포고가차도간 송배수관정비공사」에 대하여 설계변경 심의위원회를 개최하고 심의결과에 의거 아래와 같이 설계변경 시행하고자 보고합니다.

2019. 6.   .

보고자: 지방시설주사보 구본천

□ 심의대상

◦ 공 사 명 : 당산중학교~영등포고가차도간 송배수관정비공사

◦ 공사내용 : D=150 ~ 800㎜, L=1,619m

◦ 공사기간 : 2018. 5. 25. ~ 2019. 6. 28.

◦ 수 급 자 : ㈜가빛 외1  대표 송나영

◦ 도 급 비 : 2,420,504,800원

□ 심의일시 및 장소

◦ 2019. 6. 26(수)  2층 사무실

□ 심의내용

◦ 설계변경의 타당성

◦ 신규공종 단가 및 계약물량 증․감 적용 적정여부

- 신규공종 : 주철지관부설공150㎜야간 등 58개공종

- 물량증감 : 아스팔트포장절단 100~150㎜ 등 151개 공종

◦ 제경비 적정 산정 및 적용 적정성

◦ 부대공 적정 산정 검토

□ 심의결과

◦ 계약변경 타당

◦ 주요 공종 변경사항 타당

◦ 세부공종 조정내역 타당

◦ 제경비 적용 타당

□ 설계변경

◦ 위 공사 시행중 현장여건 변화에 따라 신규공종 및 계약물량 증․감 발생

- 신규공종 : 주철지관부설공150㎜야간 등 58개공종

- 물량증감 : 아스팔트포장절단 100~150㎜ 등 151개 공종

□ 설계변경 및 차수별 계약금액 변경

구 분		당초 계약금액	변경 계약금액	증 ․ 감	비 고
도급비	공급가액	2,200,458,909	2,097,520,000	감102,938,909
	부가가치세	220,045,891	209,752,000	감10,293,891
	소 계	2,420,504,800	2,307,272,000	감113,232,800

□ 조치의견

◦ 심사결과에 의거 설계변경 시행코자 하며 공사준공에 만전을 기하고자 합니다.

붙임 : 1. 설계변경 사전심의요청서 및 의결서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.

3. 제비율검증, 산업안전보건관리비검토 확인서 각1부.  끝.