문서번호	도시빛정책과-7867
결재일자	2019.6.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	도시빛사업팀장	도시빛정책과장
김정아	代이원준	06/27 김영수
협 조

한양도성 경관조명 시설개선 계획 변경추진

2019. 6.

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□	중구청 건축과
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■

한양도성 경관조명 시설개선 계획 변경추진

당초 2020년 추진예정인 한양도성 광희지구의 노후화된 경관조명 개선 사업을 금년에 아래와 같이 변경추진하여 서울의 아름다운 야간경관 창출에 기여.

□ 추진배경

○ 한양도성에 기설치된 경관조명을 개선함으로써 에너지 낭비를 방지하고 서울의 아름다운 야간경관을 창출하여 관광활성화에 기여

○ 당해 장충지구 경관조명 시설개선사업의 예산절감으로 인해 내년 시행 예정이었던 광희지구 경관조명 시설개선사업을 금년에 조기 시행하고자 함

□ 추진근거

○ 한양도성 경관조명 개선사업 추진계획(공공디자인과-9748, ’14.7.25.)

□ 사업개요

○ 위   치 : 한양도성 광희지구(중구, 광희문 남측)

○ 규   모 : 성곽 129m

- 노후 등기구(’06년 설치) 159개 교체

○ 사업기간 : 2019.7. ~ 2019.12.

○ 시행기관 : 중구청

○ 사업비 : 154백만원

□ 그간의 추진경과

○ ’05. ~ ’09. : 한양도성 8개지구 연차별 경관조명 설치

○ ’14. 7. : 한양도성 경관조명 개선사업 추진계획 수립

(8개지구 연차별 추진계획)

○ ’15. ~ ’18. : 인왕 지구 신설, 9개 지구 중 6개 지구 개선 완료

○ ’19. 2. ~ : 한양도성 장충지구 경관조명 시설개선 사업 시행중

(단위: m, 개)

구분	한양도성 경관조명 현황
	구 간	거리	등수	관리 기관	비고
계		8,829	2,435
2015년	인왕산(국사당~기차바위)	825	186	종로	신설구간 개선완료
	남산(동측~서측)	1,296	470	중부녹지 사업소	개선완료
	삼선(혜화문~낙산공원정상)	979	475
	동숭(낙산공원정상~흥인지문)	1,051	306
2016년	삼청(탐방로암문~숙정문)	900	132	종로	일부구간 개선완료 ’20년 전체구간 완료예정
2017년	청운(돈의문북측~군부대초소)	825	334	종로	개선완료
2018년	성북(와룡공원~성북쉼터)	1,900	276	성북	개선완료
2019년	장충(장충체육관~남산동측)	1,053	256	중구	진행중

□ 변경계획

○ ’20년 시행 예정이었던 광희지구를 ’19년에 조기 시행하고자 함

- 한양도성 장충지구 경관조명 시설개선사업의 자재비용 하락에 따른 당초

예산의 절감으로 여유자금 발생

⇒ 장충지구 시설개선사업비 예상 잔액 323백만원 일부를 광희지구 시설개선

사업비(154백만원)로 사용하고자 함

《당초》

(단위: m, 개, 백만원)

구분	구 간	거리	등수	관리기관	사업비
2019년	장충(장충체육관~남산동측)	1,053	256	중구	770
2020년	광희(광희문 남측~광희문)	129	159	중구	154
	삼청(창의문~탐방로암문)	1,244	161	종로	600

《변경안》

(단위: m, 개, 백만원)

구분	구 간	거리	등수	관리기관	사업비
2019년	장충(장충체육관~남산동측)	1,053	256	중구	770
	광희(광희문 남측~광희문)	129	159	중구	154
2020년	삼청(창의문~탐방로암문)	1,244	161	종로	600

한양도성 장충지구 경관조명 시설개선 예산 운용 현황

단위 : 백만원

예산과목	예산	재배정금액	잔액	내역
공공운영비	132	132	0	유지관리비
시설비	700	425	275	설계 및 공사비
감리비	70	22	48	감리비
합계	902	579	323

□ 추진계획

○ 주변 자연, 역사문화경관을 고려하여 절제되고 조화로운 야간경관 형성을 기본 방향으로, 개선사업이 기완료된 타지구와의 통일성과 광희지구만의 현장 특성을 고려하여 설계 및 시공

- 성벽과 조명기구의 이격거리 확보를 통한 문화재 훼손 방지

- 성벽 내측은 주거지와 근접하므로 시민 생활권과 융화되는 조화로운 경관 형성

□ 향후일정

○ ’19.7. : 광희지구 경관조명 개선사업 시행을 위한 예산 재배정

○ ’19.7. ~ ’19.12. : 광희지구 경관조명 개선사업 설계 및 공사 시행

○ ’20. : 삼청지구 경관조명 개선사업 추진

붙임 : 한양도성 경관조명 개선사업 추진계획(’14.7) 1부. 끝.