문서번호	도로보수과-4293
결재일자	2019.6.27.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관	도로보수과장	동부도로사업소장
박해웅	김유찬	06/27 송만규
협 조

2019년 하반기 굴착복구사업 추진계획

2019. 6.

동부도로사업소

(도로보수과)

<안전하고 편안한 도로환경 제공을 위한>

2019년 하반기 굴착복구사업 추진계획

우리 사업소에서 유지관리하고 있는 포장도로의 굴착복구 물량증가로 굴착복구기금이 추가 배정되어 그에 따른 사업 추진계획을 수립하여 시민에게 안전하고 쾌적한 도로환경을 제공코자 함.

	1		추 진 방 향

❍ 안전하고 쾌적한 도로․교통환경 제공으로 대시민 행정서비스 향상

❍ 시민을 최우선으로 생각하는 효율적 업무 추진으로 공사중 시민        불편 최소화 및 예산 절감

	2		굴착복구기금 재배정 현황

(단위:천원)

배정일	계	직접복구비	간접복구비	비 고
2019. 2. 26.	4,852,000	4,215,000	637,000	기 원인행위 완료
2019. 6. 20.	4,921,000	4,921,000	0	금회 재배정

	3		공사별 세부 추진계획

□ 기본 방향

❍ 도로 유지관리 측면을 고려하여 가급적 차로단위복구 시행

❍ 소규모 굴착구간은 표층확폭복구 시행으로 공용수명 연장 도모

❍ 아스팔트콘크리트는 적기 투입을 위해 기 계약분 활용

❍ 폐아스콘 처리용역과 노면표시 공사는 기 계약업체 활용

□ 예산 사용 계획

(단위:천원)

합 계	굴착복구 공사	노면표시 공사	폐아스콘 처리	비 고
4,921,000	4,201,000	370,000	350,000

※ 차로단위복구 공사 후 포장면과 맞지 않는 불량맨홀은 전문성 확보 및 품질관리 등을 위해 ‘불량맨홀 정비공사’에서 일괄 정비 시행

□ 사업별 공사 세부추진 일정

사 업 명	설 계	계약심사,일상감사	발 주	계 약	착 공
굴착복구공사(하반기)	’19.06.26.	’19.07.05.	’19.07.09.	’19.07.25.	’19.08.01.
노면표시 도색공사	원활한 공사 추진을 위해 기 계약업체 활용 공사 시행
폐아스콘 처리용역	원활한 공사 추진을 위해 기 계약업체 활용 공사 시행

※ 상반기 공사는 당초 재배정된 예산범위 내에서 탄력적으로 시행 후 타절 준공

	5		행 정 사 항

❍ 공사발주 전 계약심사, 일상감사 의뢰

붙임 1) 굴착복구기금 재배정내역서 1부.

2) 2019년 도로굴착기금 소요예산 현황 1부.

3) 설계도서 1부.  끝.