투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신자	중랑물재생센터 슬러지 건조시설 설치공사 건설사업관리단 책임건설사업관리기술자 서윤석
(경유)
제 목	전기분야 기술자 현장 상주 건에 대한 발주청 검토의견

1.  제7차 업무조정회의 자문의견 반영후 발주청 공기연장계획(안)(시설보수과-3515, `19.6.25.), 공기연장에 따른 변경내역서 작성 및 전기분야 기술자 현장 상주 건 (중랑슬관2019-272, `19.6.26.) 및 건설사업관리 용역 공기연장에 따른 설계변경 제출(도화(감리)2019-9090, `19. 6.26.)과 관련입니다.

2. 위 대호와 관련하여 여러차례 말씀드린 바와 같이, 중랑물재생센터 슬러지건조시설 설치공사 중 전기공사가 `19. 6.20자 준공되었습니다.

3. 해당 공사의 물량 증감 등으로 공사비가 계속 증액되고 우리센터의 예산 형편도 고려하였을 때, 우리센터로서는 해당 공사에 전기분야 기술자를 상주로 투입하기 어려운 여건이니 양해바랍니다.

4. 따라서 건설사업관리용역의 변경설계내역에서 “전기분야 기술자 대가를 삭제”하여 지체없이 변경설계내역서를 포함한 공기연장에 필요한 서류를 작성하여 우리센터로 제출하여 주시기 바랍니다. 끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
★주무관	윤정		주무관	안종필		시설보수과장	전결 06/27 윤승범
협조자	주무관	박영욱
시행	시설보수과-3583	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 (용답동) 시설보수과	/	www.seoul.go.kr
전화	02-2211-2564	/전송	02-2211-2579	/		/	부분공개(5 6)